투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 [2015년 반포서래섬 관수시설 공사]시행

1. 생태공원과-1682(2015.7.8)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 [2015년 반포서래섬 관수시설 공사] 를 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 반포서래섬 관수시설 공사

나. 공사기간 : 2015. 6. 12 ~  2015. 7. 16

다. 도 급 자 : ㈜효전건설  대표 남양윤

라. 설계변경 내용

(단위:원)

구 분	계약금액	변경금액	증감	비 고
도급액	44,113,100	44,357,200	244,100(증)

마. 변경사유 : 공사물량 증가 및 보험료 미가입분 정산

바. 예산과목 : 한강사업본부, 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설관리 및      개선, 녹지시설유지관리, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부. 끝.

주무관	김태수		생태공원과장	代석승우		공원부장	07/09 장상규
협조자	주무관	김윤석		총무과장	최대봉
시행	생태공원과-1694	(		)	접수		(		)
우	133-820	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	3780-0859	/전송	3780-0745	/	k333331@seoul.go.kr	/	대시민공개