문서번호	토목부-14350
결재일자	2015.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	진재섭	07/10 노우성

도로안내표지판 설치 변경 검토보고

(남부순환로 개봉역앞 구조개선공사)

2015. 7.

도시기반시설본부

(토 목 부)

도로안내표지판 설치 변경 검토 보고

- 남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 -

서울시(교통운영과) 문안심의 변경 승인 결과에 따라 변경 사항 반영을 위하여 검토 보고드림.

관련근거

○ 도로안내 표지판 문안변경 승인(市교통운영과-23975호, ‘14.12.19.)

○ 도로안내 표지판 문안변경 승인(區 교통행정과-41518호, ‘14.12.22)

공사개요

○ 위 치 : 구로구 개봉동234-1 ~ 198-1(개봉역 일대)

○ 규 모 : 지하차도 설치 폭4차로, 연장 736m

- 남·북측 측도설치 : 폭 2 ~ 3차로, 연장 2,280m

○ 사업기간 : 2007. 9. ~ 2015.10.31.

○ 총사업비 : 668억원

○ 도 급 사 :(주)케이에스씨건설외 1사

검토

○ 당초 도로안내 표지판은 17개로 설계되어 있었으나, 서울시(교통운영과) 문의 심의결과 문형식 표지판 1개 추가를 포함한 13개로 변경되어 설치 변경이 필요함.

○ 구조 기술지원감리원 검토의견

구분	검토자	검토 의견	비고
문형식표지판 구조계산서	구조 기술지원기술자허동녕 (감리제15-163호, 173호)	- 계산서 P21단면집계 근거첨부, P42 리브플레이트 높이 도면과 상이, P43 베이스플레이트 규격 도 면과 상이, P49,50,57,58 마찰계수 적용근거, P52,60 허용지내력 적용근거, P55,63 X Y 철근계 산서 도면과 상이(1차의견) - 지적사항 보완분 검토결과 의견없음(2차의견)

○ 도로안내표지판 수량 변경 현황

구 분	표지No	규 격		수 량 (개소)				문안심의결과
				당 초	변 경	증,감
2방향	410-5(D)	단주식:1500x1700		3	3	-		변경없음
3방향	410-1(C)	4450x2200		2	1	감)1		표지판 1개 삭제
3방향예고	410-2(A)	4450x2200		1	1	-		당초:신설 변경:판교체
3방향	410-2(A)	4450x2200 1500x500		4	-	감)4		표지판 전체삭제
2방향예고	410-3	편지식:3600x2200		1	1	-		당초:신설 변경:판교체
2방향	410-3	편지식:3600x2200		1	3	증)2		2방향표지 2개추가
2방향	410-5(A)	3000x2000 1500x500		2	-	감)2		표지판 전체삭제
2방향	410-5(C)	1850x1350x2EA		2	2	-		변경없음
운행제한표지		3600x2200		1	1	-		변경없음
문형식표지 [본표지]		6600x2800x2EA		-	1	증)1		문형식 신설 [예고표지:안양교확장공사시행]
계				17	13	감)4
공사비	당초 : 83,809천원		변경 : 130,911천원				증)47,102천원

자재비 단가 검토

구 분	신규단가 적용 내용[협의율(82.868%)]				비고
	공 종	단위	단 가	단가산출기준
설계변경 시점	- 2014년 10월 기준
신규단가 적용공종 (협의율) 82.868%	3방향표지(410-2(A) [판교체]	개소	2,808,012	-시공비 : 2014년 표준품셈 적용 -자재비 : 2014년 10월기준 정보지 조회후 최저가 적용
	2방향표지(410-3) [판교체]	개소	2,393,672
	2방향표지판(410-3) (편지식,3.6×2.2)	개소	7,615,072	-시공비 : 최조단가 산출서 기준 -자재비 : 2014년 10월기준 정보지 조회후 최저가 적용
	문형식표지판(3차로용) (6.6x2.8x2개)	개소	61,331,571	-시공비 : 2014년 표준품셈 적용 -자재비 : 2014년 10월기준 정보지 조회후 최저가 적용

※ 신규단가는 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액조정) ②항에 의거

설계가에 협의율(강제) 82.868%적용(65.736%+ 100% / 2 = 82.868%)

공사비 증․감

(단위 : 원)

공 종	수량	단위	공사비			비고
			당 초	변 경	증∙감
도로안내표지판
단주식	3	개소	2,301,906	2,301,906	-
편지식	9	개소	65,395,111	40,482,227	감)24,912,884
문형식	1	개소	0	61,331,571	증)61,331,571
직접공사비			67,697,017	104,115,704	증)36,418,687
제경비			8,492,983	14,894,296	증)6,401,313
공급가액			76,190,000	119,010,000	증)42,820,000
부가세			7,619,000	11,901,000	증)4,282,000
도급공사비			83,809,000	130,911,000	증)47,102,000

감리단 검토 의견

○ 도로안내표지판 심의기관인 서울시 교통운영과의 문안 심의결과에 의거 당초 설계되어 있는 도로안내표지판(17개) 중 종점부에 추가되는 문형식 도로안내표지판(1개)를 포함한 도로안내표지판(13개)은 금회에 변경 설치하는 것이 타당하다고 판단됨.

○ 증액되는 공사비 47,102천원에 대하여는 본부 승인 후 추후 설계변경에 반영 하고자 함.

조치계획

○ 도로안내표지판 설치 변경에 대하여 감리단 검토의견과 같이 승인하고 증액되는 공사비(47,102천원)에 대하여 추후 설계변경에 반영하고자 함.

붙 임  : 1. 감리 검토의견서 1부.

2. 도로표지판 설치 계획도 1부.

3. 관련공문 1부.  끝.