문서번호	공간정보담당관-7542
결재일자	2015.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보기획팀장	공간정보담당관
김우철		박대군	07/10 조봉연
협조
	주무관		곽인선

2015년 서울특별시 지리지 제작 및 발간 사업 월간 보고(6월)

2015. 7.

정보기획관

(공간정보담당관)

월 간 업 무 보 고 서

사업명	서울특별시 지리지 제작 및 발간
수신처	서울특별시 공간정보담당관	발신처	(사)대한지리학회
사업기간	2015. 6. 1. ~ 2015. 6. 31.	보고일	2015. 7. 9.
주요 내용	집필진 및 편집진 전체회의 편집구성안 확정 집필 착수

1. 주요 진행 사항

항목	주요 사항	진행일
과제 운영	집필진 및 편집진 전체회의	2015. 6. 4.
조사 및 집필	집필진 자료조사 및 분석 집필 착수	2015. 6. 15. ~ 2015. 6. 15. ~
편집 및 심의	집필(편집)구성안 작성	2015. 6. 15.
자문 및 감수	발간항목 확정	2015. 6. 22.
교열 및 인쇄

2. 금월 업무 진행 현황

	업무 진행 현황	진행일정	진행여부
과제 운영	집필진 및 편집진 전체회의 - 회의록 첨부	6/4	100%
조사 및 집필	집필진 구성 완료 - 「미래서울」장 집필위원 선정 완료 집필진 자료조사 및 분석 집필 착수	6/1 6/15 ~ 8/15 6/15 ~ 8/31	100% 25% 20%
편집 및 심의	집필(편집)구성안 작성 - 항목 첨부 집필물 및 참고자료 공유를 위한 온라인 작업공간 개설(웹하드) - webhard.co.kr 이용	6/15 6/12	100% 100%
자문 및 감수	발간항목 확정 - 집필(편집) 구성안과 같음	6/22	100%
교열 및 인쇄

2015 서울특별시 지리지 제작 및 발간                                                         (사)대한지리학회

3. 익월 업무 진행 현황

	업무 진행 현황	진행일정	진행목표
조사 및 집필	집필진 자료조사 및 분석 (2월차) 집필 착수 (2월차)	6/15 ~ 8/15 6/15 ~ 8/31	50% 40%
편집 및 심의	편집회의 개최 편집세부계획 수립	7/6 7월 중순	100% 50%
자문 및 감수
교열 및 인쇄	인쇄 및 출판 예산 협의 인쇄 및 출판 일정 협의	~ 8/31 ~ 8/31	40% 60%

4. 산출물 관리

2015 서울특별시 지리지 제작 및 발간                                                         (사)대한지리학회

산출물 명	주요 내용	파일 명	상태
과제 운영	집필진 및 편집진 전체회의 회의록	서울지리지 집필회의록.hwp
조사 및 집필	연구진 확정 및 명단	서울지리지 연구진.xlsx
편집 및 심의	집필(편집)구성안	서울지리지 집필구성안.hwp
자문 및 감수
교열 및 인쇄

5. 월간보고 회의내용

주요내용

1. 착수보고회에 나온 자문내용이 최대한 반영되게 요청

- 해안지형과 특수지형은 구성목록 제외

- 용어의 가치중립

- 인포그래픽 추가와 시각화 강조

- 일반인 누구나 알기 쉽게 대중성 강조

- 데이터 공개시 저작권 문제 검토

2. 서울의 특수성과 고유성이 강조된 역사도시 서울 표현

- 서울역 고가재생7017, 빅데이터를 활용한 야간버스 도입, ICT활용 북촌등

3. 공정관리 철저요청

- 집필 초고완성(8월말)을 목표로 중간보고회(9월예정) 차질없이 준비

- 7월까지 집필내용을 8월초까지 서울시로 통보

6. 주요 추진일정 개관

구 분 기 간		제1월		제2월		제3월		제4월		제5월		제6월		제7월		제8월
계획수립 준비	발주 및 과업시행계획서 제출
	편집진, 집필진 구성 및 세부계획 수립
	자문위원회 구성
조사, 자료수집 및 분석, 초안 작성	발간내용 확정
	집필진 자료조사 및 분석
	집필 원고 초안 작성
편집 및 심의	발간내용에 대한 편집회의
	발간내용 초안 마련
	편집자료 수집
감수, 자문, 심의	초고 편집 및 검토
	교정본 가안 확인 및 초벌 인쇄
	심의 요청
심의결과 조치, 인쇄 및 제출	추가 교열 및 심의결과 반영
	인쇄작업
	최종본 완성
	전자책 완성

***********************

**********************

****************************