문서번호	물재생과-4523
결재일자	2015.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
차성민		代최승룡	07/10 김동기
협조
	주무관		최승룡

청계천 하류횡단 차집관거 개선공사 준설토 운반 용역 설계변경(최종) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07

중랑물재생센터

[물재생과]

청계천 하류횡단 차집관거 개선공사 준설토 운반 용역

설계변경(최종) 보고

우리센터에서 시행중인『청계천 하류횡단 차집관거 개선공사 준설토 운반 용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 청계천 하류횡단 차집관거 개선공사 준설토 운반 용역

○ 용역기간 : 2015. 06. 22 ~ 2015. 07. 10

○ 도 급 액 : 금6,124,000원

○ 도 급 자 : 산양환경산업(주) 대표 장택무

□ 설계변경 사유

○ 준설토 재활용처리 수량 조정에 따른 물량 감소 발생

□ 설계변경 내용

○ 용역금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
총용역비		6,124,000	5,124,000	감 1,000,000
도급비	공급가액	5,567,273	4,658,182	감 909,091
	부가가치세	556,727	465,818	감 90,909
	계	6,124,000	5,124,000	감 1,000,000

○ 설계변경 주요 내용

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증감
청계천 하류횡단 차집관거 개선공사	L=45Km (24톤덤프)	㎥	300	251	감 49

□ 조치계획

○ 상기 내용에 대하여 설계변경하고 정산코자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경사유서 1부.

2. 변경내역서  1부.  끝.