의원 요구 자료 제출

시 행	주차계획과-9251
결재일자	2015.7.10.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

주무관		차고지관리팀장	주차계획과장	교통기획관	도시교통본부장	결재
김윤희		이경재	윤보영	윤종장	07/10 신용목
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 557번, 오신환 의원, 정무위원회)

국회의원 정무위원회 오신환 의원 요구자료를 따로붙임과 같이 제출코자합니다.

따로붙임 : 의원 요구자료 1부.  끝.

오신환 의원(정무위원회, 새누리당, 서울관악을)

요구번호 : 557번

6. 신림동 140번지 일대 공영 차고지 이전 사업 진행상황 및 활용계획

(차고지 이전 도면 상세부분 별도 표기)

6. 신림동 140번지 일대 공영 차고지 이전 사업 진행상황 및 활용계획

※ 신림공영차고지 사업개요

· 위    치 : 관악구 신림동 140-2일대

· 사업규모 : 10,232㎡

· 사업기간 : 2011 ～ 2018

· 총사업비 : 628억원(보상비 192억, 공사비 355억,  설계·감리비 등 81억)

□ 진행상황

- 1990. 04 : 대도시교통종합대책

- 1994. 03 : 시내버스 공영차고지 조성계획 수립

- 2007. 07 : 신림동 131번지 차고지 매입(한남운수)

- 2010. 7. 21 : 공영차고지 추가 조성계획수립(부시장방침 제270호)

- 2011.4.29  : 신림외 1개소 차고지 조성 기본 및 실시설계 용역 발주

- 2011. 6. 15 ～ 12.10  : 기본 및 실시설계완료(차고지)

- 2013.  6. 7 : 신림공영차고지 진입로조성 실시설계용역(진입로)

- 2014. 2. 14 : 시도시공원위원회 자문(안) 행정2부시장 보고(주차계획과)

※ 시장요청사항(2014.3.17) : 신림공영차고지 지하 저류조 설치방안 검토

- 2015.2월~ : 도시관리계획변경 결정을 위한 의회 의견 청취

- 2015.2.28 : 실시설계(진입로 조성) 용역 완료

- 2015.3.12 : 서울특별시 도시관리계획(용도지역,자동차정류장,유수지,도로) 변경결정 의견청취

- 2015.3.30 : 타당성 조사 의뢰(한국지방행정연구원)

※ 2015.5.18. : 타당성 조사 약정서 체결 - 6개월 소요

□ 활용계획

- 시내버스업체의 차고지 부족에 따른 주택가 노상박차 등의 민원해소와 노선사유화 배제 및 공동배차제 실시여건을 조성하기 위하여 버스 104대(지상 60대, 지하 44대), 소형차량 19대(지상 4대, 지하 15대)를 주차할 수 있는 규모로 조성하고,

- 지상 일부 공간에는 2,046㎡의 가로공원을 조성하여 녹지공간으로 활용

- 하부 지하에는 용량 35,000㎥ 규모의 저류공간을 설치하여 폭우시 수해 예방예정임

붙임 : 1. 위치도 1부.

2. 현황도 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (주차계획과)	담당팀장	이 경 재
	☎2133-2367	주 무 관	김 윤 희
	작 성 일 : 2015. 7.