투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	『서울대공원 독신자숙소 제2차 리모델링 건축공사』 준공정산 설계변경 시행

1. 시설과-4071호(‘15. 7. 9)와 관련입니다

2. 서울대공원 독신자숙소 제2차 리모델링공사와 관련하여 물량 변경사항 및 보험료 등에 대하여 아래와 같이 준공정산 설계변경 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울대공원 독신자숙소 제2차 리모델링 건축공사

나. 공사금액 : 금118,540,300원

다. 공사기간 : 2015. 05. 15. ~ 2015. 07. 13

라. 시 공 자 : ㈜양대이엔지 대표 윤 광 현

마. 준공정산 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
도급금액	118,540,300	118,540,300	변경없음

바. 설계변경 사유 : 공사물량 증감 및 보험료 등 정산

붙임 : 1. 준공정산 설계변경 보고서 각 1부.

2. 정산 내역서 1부. 끝.

	시설과장
★주무관	이강호		시설과장	07/10 공헌구
협조자	주무관	이상국
시행	시설과-4074	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7411	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개