투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	공사준공기한 연기의뢰(휀스설치)

1. 북서울꿈의숲관리사무소-3970(2015.5.27.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『월영지 주변 팔각휀스 설치공사』의 공기연장을 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 월영지 주변 팔각휀스 설치공사

나. 공사개요 : 팔각휀스 176m, 점토블록걷기 450㎡

다. 도급업체 : ㈜네이쳐드림 대표 강창원

라. 공사금액 : 금12,523,500원

마. 공사기간 : 2015. 6. 03. ~ 7. 11.

바. 준공일자 : 당초 2015. 7. 11. → 변경 2015. 7. 22.

붙임 : 준공기한연기의뢰서 1부. 끝.

	북서울꿈의숲관리사무소장
주무관	황서현		관리팀장	김환형		북서울꿈의숲관리사무소장	07/10 代정예자
협조자
시행	북서울꿈의숲관리사무소-5043	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 월계로 173(산28-6)	/
전화	02-2289-4013	/전송	02-2289-4040	/	spinosus@seoul.go.kr	/	대시민공개