문서번호	시설관리과-18506
결재일자	2015.7.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
배경희		최재영	07/10 오기석
협조

급수공사 연기보고서

[***********(개량-2)]

2015. 7

동부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거 동대문구 지역담당 업무 수행 중 공사기간 연기 사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 현 황

가. 공 사 명 : 2015년 제기동 외 6개동 상수도공사(연간단가계약)

나. 도 급 자 : 수호건설 대표 문병순

□  보고내용

○ 급수공사 작업지시 사항 중 아래와 같은 내용으로 부득이 공사기한 연기가 필요한 실정입니다.

공사 종류	공사위치	공사개요	연기 사유	공사일자
				당초	변경
개량-2	*********	개 량 (직결급수 및 물탱크 철거)	수요가 내부공사 지연으로 작업일정 협의 중	2015.07.01 ~2015.07.10	2015.07.01 ~2015.07.24

□  처리의견

○ 원활한 공사시행을 위해 공사기한을 연기하여 공사현장 안전관리 및 민원처리에 만전을 기하고자 합니다.

첨부 : 1. 준공기한 연기요청서(개량-6) 1부.  끝.