문서번호	총무과-11541
결재일자	2015.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
강상천		최대봉	07/10 이상국
협 조
	주무관			임봉순

설계변경 보고

- 안내센터 청사 외부계단 개선 공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				18백만원

2015. 7.

한강사업본부

총 무 과

안내센터 청사 외부계단 개선 공사 설계변경 보고

안내센터 외부계단 개선공사 중 변경사항이 발생하여 실정보고서 검토결과 탄성포장재 포설 수량 및 공정을 변경 시공 하고자 함

■ 공사기간 : ‘15. 6. 23 ~ ‘15. 7. 24

■ 공사내용 : 외부계단 개선

❍ 외부계단 마감재 교체 : 기존 마감재(시멘트몰탈) 철거 및 탄성포장재 포설

■ 도급비 : 17,771천원 (부가가치세 포함)

❍ 예산과목 : 한강사업본부 청사시설개선 및 유지관리, 시설비

■ 변경내용

❍ 변경전 : 시멘트몰탈 철거 및 탄성포장재 포설

❍ 변경후 : 시멘트몰탈 위 방수 후 탄성포장재 포설

■ 변경사유

❍ 시멘트몰탈 두께가 설계내역(2cm)보다 두꺼워(8cm) 탄성포장재 포설 불가

❍ 몰탈 내부에 철재앵글 삽입 : 앵글 및 몰탈 완전철거 불가(계단 구조안전 위험)

■ 검토의견

❍ 우천 시 철재계단 부식 원인인 몰탈 제거가 불가하므로 몰탈면 방수 처리 후 탄성포장재 포설하여 철재계단 부식 원인을 방지 하는 것이 타당하다고 판단됨

❍ 추가되는 공사비(방수공사)는 공사수량을 조정(여의도 안내센터 감액)하여 도급비  증가 없이 조치 후, 여의도 안내센터 외부계단은 추후 별도 개선 시행

첨부 : 실정보고서 및 공사비 증감 내역서 1부.