문서번호	정수시설과-2467
결재일자	2015.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김종수		07/13 윤종민
협 조
	주무관			변병수

설계변경 심의위원회 개최

(2015 뚝도아리수정수센터 조경관리 용역)

2015. 7

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의위원회 개최

우리 정수센터에서 시행하는 2015년 뚝도아리수정수센터 조경관리 용역에 대한 심의 위원회를 개최하여 설계변경(1차) 시행코자 함

□ 설계변경 현황

○ 용 역 명 :『2015년 뚝도아리수정수센터 조경관리 용역』

○ 용역개요

구분	잔디깍기	풀깍기	풀뽑기	일반전정	관목전정	수목식재	수목시비
당초	59,940㎡	32,560㎡	24,414㎡	100주	1,050㎡	2,832주	105주
변경	59,940㎡	32,560㎡	17,361㎡	100주	1,050㎡	2,832주	105주
증감	-	-	7,053㎡	-	-	-	-

※ 신규공종 : 풀깍기 처리운반비 92,500㎡(발주 설계 누락)

○ 용 역 비 : 당초 76,682,000원

변경 76,682,000원

○ 용역기간 : 2015. 04. 03 ∼ 2015. 12. 10

○ 계약업체 : ㈜에코그린  대표 이정은

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비(기타교체비)

□ 심의위원회 개최 개요

○ 심의위원장 : 정수시설과장

○ 심의위원 : 정수시설과(변병수,곽희영,최양교), 정수과(김진수)

○ 일시 및 장소 :‘15. 7. 13(월) 11:20, 정수시설과

□ 심의내용

❍ 용역물량 증감 및 신규공종 발생에 따른 설계변경 적정성 심의

- 물량변동 적정성 여부

- 계약변경(증ㆍ감) 물량 및 신규 계약단가 적용 적정성 여부

- 제경비 산정 및 적용의 적정성 여부 등

설계변경 심의위원회

□ 일  시 : ‘15. 7. 13(월) 11:20

□ 장  소 :  정수시설과

□ 안  건 : 2015년 뚝도아리수정수센터 조경관리 용역

설계변경(1차) 심의

□ 설계변경 사유 : 물량 증ㆍ감 및 신규 공종 발생

□ 심의결과

구 분	직위	심의결과	성 명	비 고
위원장	정수시설과장		윤 종 민 (인)
위 원	정수시설과 기계6급		최 양 교 (인)
위 원	정수시설과 전기6급		곽 희 영 (인)
위 원	정수시설과 시설6급		변 병 수 (인)

붙임 : 설계변경 관련 서류 각 1부. 끝