투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 책임감리원
(경유)
제목	업무지시전(부력방지앵커 시공길이 변경 실정보고 승인)

1.업무지시현장 :  서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 (주)도화엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2015-07-13 00:07:00

3.지 시 내 용 :“서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업”부력방지앵커공사와 관련 실시설계시 조사된 지반 및 지질과 상이하여 설계기준에 맞도록 시공길이 변경에 따른 부력방지앵커 실정보고에 대하여 승인하오니 품질 및 안전성이 확보되도록 시행에 만전을 기하시기 바랍니다.

붙임 : 보고서 1부. 끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							김상용			환경시설과장					윤방식					방재시설부장					07/13 임춘근
협조자
시행			방재시설부-9301									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층															/
전화		02)3708-8782						/전송			02)3708-8756					/	kimsy2405@seoul.go.kr												/	대시민공개