문서번호	교통운영과-13615
결재일자	2015.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통개선팀장	교통운영과장
문기영		유승효	07/14 강진동
협조

2015년 횡단보도 기본 및 실시설계 용역대상 추가 보고

2014. 7.

도시교통본부

(교통운영과)

2015년 횡단보도 기본 및 실시설계 용역대상 추가 보고

보행자의 이동 편의 증진을 위한 횡단보도 설치로 사람이 우선하는 걷고 싶은 도시 서울을 조성코자 『2015년 보행불편해소를 위한 횡단보도 설치사업』추진 중 변경사항이 있기에 보고드림

□ 사업근거

□ 도로교통법 시행규칙 제11조(횡단보도의 설치)

□ 2015년 횡단보도 확충․정비 추진계획(교통운영과-4591호, ’15.03.10)

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 2015년 보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비 사업

□ 사업대상 : 백제공영주차장 입구 등 16개소

□ 사업기간 : ’15. 1. ~ ’15. 12.

□ 사 업 비 : 1,813,800천원(시비)

□ 사업내용

- 횡단보도 노면표시, 신호기 설치, 보도 턱 낮춤, 교통안전표지 설치

- 가로수, 가로등, 한전분전함, 소화전 등 보행지장물 이설

【기본 및 실시설계 용역 개요】

· 용 역 명 : 2015년 보행불편 해소를 위한 횡단보도 설치 기본 및 실시설계 용역

· 용역대상 : 백제공영주차장 입구 등 55개소

· 용역규모 : 기본설계 30개소, 실시설계 20개소, 모니터링 10개소

· 사업기간 : ’15. 5. 11. ~ ’15. 12. 30.

· 계약금액 : 91,380천원

· 계약업체 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소  대표 김 동 수

□ 민원사항

□ 주요내용

연번	위치	민원내용	비고
1	상도터널입구 삼거리(노들역)	노들역 2번~4번 출구 구간 횡단보도가 설치되어 있지 않아 교통약자 도로횡단 불편
2	법원정문 교차로	법원정문 교차로에 동측 횡단보도가 설치되어 있지 않아 관공서를 이용하는 보행자 불편
3	시청 옆	시청~서울지방국세청남대문별관 구간 횡단보도가 설치되어 있지 않아 교통약자 도로횡단 불편

□ 조치계획

□ 횡단보도 확충정비 사업대상 조정으로 민원해결

- 원만한 시 현안사업 추진 및 무단횡단 사고 방지를 위해 기존 사업대상지점 조정

- 당초 백제공영주차장 등 55개소에 숭례문 교차로 등 3개소 사업대상 추가

- 추가지점

연번	자치구	지점명	개선내용	비고
1	동작구	상도터널입구삼거리(노들역)	단일 3면 신설	박기열시의원
2	서초구	법원정문 교차로	단일 1면 신설	민 원
3	중구	시청 옆	단일 1면 신설	민 원

□ 설계용역 과업대상 조정

- 상기와 같이 사업대상 조정에 따라 설계용역 과업대상을 조정하여 2015년 횡단보도 확충정비 사업 추진에 만전을 기함

붙임 : 2015년 횡단보도 확충정비 대상지점 변경현황 1부.  끝.

□ 2015년 횡단보도 확충 ‧ 정비 대상지점 변경현황

연번	지 점 명	지 점 위 치	개 선 내 용	비 고
1	백제고분공영주차장 입구	송파구 방이동 125	단일 1면 신설
2	낙성대역 앞	관악구 인헌동 1632-2	단일 1면 신설
3	상일여고 앞 사거리	강동구 상일로 21	교차로 남측 1면 신설
4	연희동 대우아파트 입구	서대문구 연희동 353-89	교차로 북측 1면 신설
5	신은초교 앞	양천구 신정동 1319	교차로 서측 1면 신설
6	숯내교 앞	강남구 자곡동 50-9	교차로 서측 1면 신설
7	대흥동 3-108 앞	마포구 대흥동 3-108	단일 1면 신설
8	한국양봉농협 본점 앞	중구 신당동 370-61	단일 1면 신설
9	사당역 교차로	동작구 사당1동 1042-1	교차로 북측 1면 신설
10	새마을금고 서빙고동점 앞	용산구 동빙고동 89-5	단일 1면 이설
11	명일초등학교 앞	강동구 암사1동 418-18	단일 1면 신설
12	잠실2동 주민센터 앞	송파구 올림픽로 159	단일 1면 신설
13	난향초등학교 앞 삼거리	관악구 난향동 668-11	교차로 북측 1면 신설
14	종로5가역 교차로	종로구 동호로 407	교차로 동측 1면, 서측 1면 신설
15	세곡동주민센터 앞	강남구 율현동 278-1	단일 1면 신설
16	충무로역 교차로	중구 필동1가 30-1	교차로 서측 1면 신설
17	가양9단지 911동 앞	강서구 허준로 234	횡단보도 확폭
18	가양9단지 907동 앞	강서구 허준로 234	횡단보도 확폭
19	가양도시개발9단지 902동 앞	강서구 허준로 224	횡단보도 확폭
20	한산초등학교 앞 교차로	강동구 둔촌2동 149	교차로 동측 1면 신설
21	강일중학교 앞 교차로	강동구 암사3동 414-16	교차로 서측 1면 신설
22	국사봉터널 남측	관악구 성현동 490-20	단일 3면 신설
23	삼성산주공아파트 앞 삼거리	관악구 신림동 산87-17	교차로 서측 1면 신설
24	청계5가교차로(마전교)	종로구 종로5가 398-3	북측 1면, 남측 1면 신설
25	청계천로 버들다리교차로	종로구 종로5가 410	북측 1면, 남측 1면 신설
26	청계6가교차로(오간수교)	종로구 창신동 440-10	북측 1면, 남측 1면 신설
27	청계8가교차로(황학교)	동대문구 신설동 109-13	북측 1면, 남측 1면 신설

연번	지 점 명	지 점 위 치	개 선 내 용	비 고
28	시설관리공단교차로(고산자교)	성동구 마장동 523-1	북측 1면, 남측 1면 신설
29	안국동 교차로	종로구 관훈동 154-1	교차로 서측 1면 신설
30	방배대우효령아파트 앞	서초구 효령로 84	교차로 서측 1면 신설
31	수서경찰서 교차로	강남구 개포동 12-4	대각선횡단보도 설치
32	신림교 사거리	관악구 신림로58길 25	대각선횡단보도 설치
33	현대시장교차로	관악구 양녕로 49	대각선횡단보도 설치
34	청계초,중원중학교앞교차로	노원구 중계동 511-3	대각선횡단보도 설치
35	공릉초교후문 앞 교차로	노원구 공릉동 598-17	대각선횡단보도 설치
36	평제약국 앞 교차로	동대문구 제기동 1193	대각선횡단보도 설치
37	경원중학교사거리	서초구 잠원동 66-1	대각선횡단보도 설치
38	장미아파트 교차로	송파구 신천동 11-4	대각선횡단보도 설치
39	문정중학교 교차로	송파구 문정동 12-1	대각선횡단보도 설치
40	경동초교 앞 교차로	성동구 성수동1가 14-78	대각선횡단보도 설치
41	중곡역 사거리	광진구 중곡동 273-2	대각선횡단보도 설치
42	대원외고 입구 사거리	광진구 중곡동 266-3	대각선횡단보도 설치
43	구로디지털단지우체국 앞 교차로	구로구 구로동 188-35	대각선횡단보도 설치
44	구로구청구의회 교차로	구로구 구로동 65	대각선횡단보도 설치
45	왕십리역 앞 교차로	성동구 행당동 168	대각선횡단보도 설치
46	청과물시장(농협)사거리	영등포구 영등포6가 145	대각선횡단보도 설치
47	우리벤처타운2사거리	영등포구 문래3가 82	대각선횡단보도 설치
48	서울의료원교차로	중랑구 신내로 156	대각선횡단보도 설치
49	문정초등학교 교차로	송파구 문정로5길 20	대각선횡단보도 설치
50	고척중 교차로	구로구 고척동 52-357	대각선횡단보도 설치
51	청계천로 광교교차로(광교)	종로구 우정국로 2	대각선횡단보도 설치
52	청계천로 청계7가교차로(다산교)	종로구 창신동 436-73	대각선횡단보도 2면 설치
53	청계천로 영도교교차로(영도교)	중구 청계천로 370	대각선횡단보도 2면 설치
54	청계천로 비우당교교차로(비우당교)	성동구 상왕십리동 12-45	대각선횡단보도 2면 설치
55	청계천로 청계9가교차로(무학교)	성동구 하왕십리동 286-2	대각선횡단보도 2면 설치
56	상도터널입구삼거리(노들역)	동작구 노량진로 248	횡단보도 3면 신설	추가
57	법원정문 교차로	서초구 서초대로 269	단일 1면 신설	추가
58	시청 옆	중구 세종대로 119	단일 1면 신설	추가