보고서(상수도시설물공사 준공연기)

★주무관	급수운영과장			결재
양윤선	07/14 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-18039

「성동,광진구관내 상수도 시설물공사」 감독업무 수행 중 아래와 같은 상황이 발생하여 보고합니다.

2015. 7. 14.

****************************

제목 : 상수도 시설물공사 준공 연기

□ 현   황

○ 공사명 : **************************************

○ 위  치 : ********************

○ 계약자 : ****************

○ 작업지시 번호 : 작업지시-03, 작업지시-04

○ 공사기간 : 2015.06.25.~2015.07.17.

□ 보고내용 및 조치의견

○ 위의 공사는 2015.07.17.까지이나 상수도 시설물 보수공사로 우기 및 단수관련하여 주민과 일정 협의후 아래와 같이 준공기간을 연기하여 신뢰받는 상수도 행정에 기여하고자 합니다.

- 당초 공사기간 : 2015.06.25.~2015.07.17.

- 변경 공사기간 : 2015.06.25.~2015.08.03.

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과

따로붙임 : 상수도 시설물보수공사 작업기한 연기요청서 1부(별첨).  끝.