투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	통합 작업지시 2차 실정보고(1회) 승인 통보(2015년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)통합,규제처리)

1. 영호 본 15-07-03(2015.07.13.)호와 관련입니다.

2.「2015년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)통합,규제처리-강서」와 관련하여, 2차 작업지시 실정보고에 대하여 검토한 결과, 원안대로 승인 통보하오니 작업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고사항 승인 (작업지시 2차)

1) 1차 작업지시 장소 및 작업내용

연번	교차로명	위치	작업내용	비고
1	신규	강서구 방화대로 48길 49 앞 삼거리	삼거리 교차로 내 차량신호등 및 보행신호등 신설

2) 실정보고 승인사항

가) 당초 기초앙카(Φ200mm) 신설지점 터파기시 지장물(도시가스 라인)이                                 확인되어 설치위치 변경.

나) 당초 기초앙카(φ150mm) 신설지점 터파기시 지장물(상수도관)이                                확인되어 기초 베이스 매립시공에서 노출시공으로 변경.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	선우전기 대표자 조남국,(주)영호이앤씨 대표자 정숙영
★	홍승찬		기전과장	07/14 박재경
협조자	주무관	박태진
시행	기전과-8649	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1(양천로 237)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개