문서번호	급수설비과-4908
보존기간	년
결재일자	2015.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	급수설비과장	급수부장
김형준	김기상	07/14 이규상
협 조

건설사업관리용역(강남지역)

급수공사 주간실적 보고

2015. 7. 14

상수도사업본부

(급수설비과)

건설사업관리용역(강남지역)

급수공사 주간실적 보고

상수도공사(급수,누수복구,시설물)강남지역 건설사업감리용역 추진에 따라 급수공사 분야의 주간 실적을 검토하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ. 건설사업관리용역 현황

□ 용역개요

○ 용역대상

- 급수공사 분야 (급수공사,불용관,보호통교체,포장 등) : 17,694건

- 누수복구 분야 (누수복구,포장,공사장 입회 등) : 16,752건

- 시설물 분야 (노후밸브교체, 배수지 시설물 등) : 3,145건

○ 용역기간 : 2015. 6. 22 ~ 2017. 6. 21

○ 계약금액 : 4,106,329,000원

○ 도 급 자 : (주)이준엔지니어링, ㈜건양엔지니어링,(주)신성엔지니어링

□ 인력현황

○ 근무인원 : 29명

- 급수 : 13명, 누수 10명, 시설물 4명, 책임기술자1명, 비상주 1명

Ⅱ. 검토회의 및 주간 추진 실적

□ 검토회의

○ 일 시 : ’15. 7.13(월) 14:00~14:40

○ 장 소 : 급수부 회의실

○ 참석자 : 담당주무관, 책임 및 비상주건설사업관리기술자 (총 3명)

○ 회의내용 : 주간업무 실적 및 업무 지시사항

□ 추진 실적

○ 급수공사(건설사업관리기술자)

- 기 간 : 2015. 06. 29 ~ 07. 05.

구 분		감독대행			현 장 입회율 (%)	부설연장 (m)	시정조치 (건)
		계	현장입회 (건)	사후확인 (건)
금 주		162	158	4	97.5	933	8
누계	’15.6.22이후	288	279	9	96.8	1,551	12
	’15.1.1이후	3,187	3,176	11	99.6	11,767	100

- 시정조치 : 안전 3건, 기타 5건.

○ 포장복구공사(건설사업관리기술자)

- 기 간 : 2015. 06. 29 ~ 07. 05.

구 분	계			급수공사업체 복구			포장업체 복구
	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)
금 주	200	172	86.0	31	30	96.7	169	142	84.0
누 계	315	263	83.4	44	43	97.7	271	220	81.0

○ 건설사업관리기술자 상호 업무지원

- 기 간 : 2015. 06. 29 ~ 07. 05.

구 분	계				사업소 내				사업소간
	계	급수	누수	시설물	소계	급수	누수	시설물	소계	급수 공사	누수 복구	시설물
금주(회)	9	9	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
누계(회)	17	15	0	2	17	15	0	2	0	0	0	0

□ 업무 지시사항

○ 공사장 안전관리 철저

○ 사급자재에 대한 품질관리 철저(kc인증 등 검사실시)

○ 단수 등 민원발생 예방 철저

○ 공사간, 사업소간 지원근무 철저

○ 신규 급수공사 업체에 대한 장비 점검 실시

따로붙임 : 건설사업관리용역 주간실적 각 1부. 끝.