서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	G밸리 근로자 복합공간 조성 관련 기술용역 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 계약기간 연장 의뢰

서울디지털산업단지 내 근로자 문화복지센터 조성과 관련하여 보다 심도있는 조사·분석 등을 위해 붙임과 같이 계약기간 연장을 의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다

- 계약기간 연장 의뢰 내역

·당  초 : 2015.04.17. ~ 2015.07.16.

·변경후 : 2015.04.17. ~ 2015.08.28. (43일 연장)

※ 계약금액은 동일하고, 서울시 요청에 따른 과업기간 연장이므로 지체상금 미부과

붙임 1. G밸리 근로자 복합공간 조성 관련 기술용역 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역           계약기간 연장 계획 1부

2. 합의각서 1부(별도 송부).  끝.

	경제정책과장
★주무관	홍기영		G밸리팀장	한정훈		산업거점조성반장	07/14 김재진
협조자
시행	경제정책과-9776	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 1동 9층	/
전화	3707-9932	/전송	3707-9939	/	bawoo@seoul.go.kr	/	대시민공개