투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(1회)

우리 사업소에서 시행중인 「2015년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)-북부」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)-북부

나. 공사개요 : 소규모 포장복구 34a, 절삭 덧씌우기 252a 등

다. 계 약 일 : 2015. 04. 01.

라. 공사기간 : 2015. 04. 03. ~ 2015. 12. 31.

마. 공 사 비 : 1,462,092,000원(도급비 639,068,000원)

바. 도 급 자 : 에이치에프건설(주) 대표 황 행 묵

사. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		설계변경 금액		증․감	비 고
		당 초	변 경
총공사비		1,462,092,000	1,104,239,650	-
도급비	공급가액	580,970,910	828,243,640	증 247,272,730
	부 가 세	58,097,090	82,824,360	증 24,727,270
	계	639,068,000	911,068,000	증 272,000,000
관 급 비		511,024,000	511,024,000	-
이 전 비		312,000,000	40,000,000	감 272,000,000

아. 설계변경 사유 : 공종별 정비물량 조정 등 ※ 별첨 설계변경사유서

자. 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임  1. 설계변경사유서 1부.

2. 설계변경 시행계획서 1부.

3. 변경설계서 1부. 끝.

주무관	최병수		도로보수과장	이석재		북부도로사업소장	07/15 노영석
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-6874	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울시 강북구 한천로 913(번동) 북부도로사업소 도로보수과 별관 2층	/
전화	02-944-5434	/전송	02-945-5072	/	cbs0656@seoul.go.kr	/	대시민공개