문서번호	시설관리과-15918
결재일자	2015.7.15.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
구본천		07/15 우종근
협조
	주무관		최희권

설계변경 심의결과 및 변경 시행 보고[2014년 동작 영등포구관내 급수공사 및 누수복구공사 건설폐기물처리용역(장기계속) - 2회(최종)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07.

명에 의거「2014년 동작 영등포구관내 급수공사 및 누수복구공사 건설폐기물처리용역(장기계속)」에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의결과에 의거 아래와 같이 설계변경 시행하고자 보고합니다.

2015. 07.   .

보고자: 지방시설주사보 구본천

□ 심의대상

◦ 용 역 명 : 2014년 동작 영등포구관내 급수공사 및 누수복구공사

건설폐기물처리용역(장기계속)

◦ 용역내용 : 폐아스콘 2,265톤, 폐콘크리트 3,408톤

◦ 용역기간 : 2014. 8. 11. ~ 2015. 7. 15.

◦ 수 급 자 : 삼환환경(주)  대표 강재성

◦ 도 급 비 : 92,488,000원(감액79,961,500원)

□ 심의일시 및 장소

◦ 2015. 07. 15(수)  2층 회의실

□ 심의내용

◦ 설계변경의 타당성

◦ 계약물량 증․감 적용 적정여부

◦ 계약금액 조정 (설계변경) 등.

□ 심의결과

◦ 설계변경 타당

□ 설계변경

◦ 위 용역 시행중 현장여건 변화에 따라 계약물량 증․감 발생

- 물량증감 : 폐아스콘 383㎥감소, 폐콘크리트 1,427㎥ 감소

□ 설계변경 및 차수별 계약금액 변경

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
총 부기금액	172,449,500원	92,488,000원	79,961,500	감 액
1차수	37,131,600원	37,131,600원	-	변동 없음
2차수	135,317,900원	55,356,400원	79,961,500	감 액

□ 조치의견

◦ 심사결과에 의거 설계변경코자 하여 용역 준공에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 사전심의위원회 개최 및 의결서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.