문서번호	토목부-14578
결재일자	2015.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상욱		권혁대	07/15 노우성
협조
	주무관		강철규

보도부 포장재 변경 검토보고

(용비교~행당중간 도로개설공사)

2015. 7.

도시기반시설본부

(토목부)

보도부 포장재 변경 검토보고

(용비교~행당중간 도로개설공사)

서울시 걷고 싶은 길(서울숲 ~ 남산길)을 연결하는 보행로인 용비교 보도를 목재데크로 시공하여 이용 시민들의 정서적 편익과 주변환경과 조화되도록 하기 위한 검토보고임

Ⅰ		관련근거

○ PH15-용행감-131호(2015. 7.13.) 실정보고 승인요청(보도부 목재데크 설치)

○ 용비교 공정 합동회의(2015. 4. 9.) 시 교량안전과, 터널건설과, 감리단, 시공사

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 성동구 금호4가동 ~ 성수1동 구간

○ 규    모 : 도로(용비교) 확장 및 도로개설

- 왕복4차로 → 6차로 확장 (폭B=5.2m, 연장 L=719m)

○ 공사기간 : 2007. 3. ∼ 2015.12.

○ 도 급 비 : 26,477백만원

○ 감 리 사 : ㈜평화엔지니어링,(주)선진엔지니어링  ○ 시 공 사 : 한신공영㈜

Ⅲ		감리단 보고내용

□ 보도부 목재데크 설치

➀ 검토사유

- 용비교 보도부가 친환경 소재가 아닌 콘크리트계열포장(PCMC)토록 설계되어 주변 환경(응봉산, 중랑천과 조화되지 못함.

- 보도부를 주변 환경과 조화되게 목재데크로 시공하여 이용 시민들의 정서적 편익을 도모하고, 서울시 걷고 싶은길(서울숲-남산길)을 연결하는 보행로로의 역할을 증대시키고자 함.

➁ 현황

위치도
응봉산 목 재 보 도 전 경
단면도
현 황
	설치전	설치후

보   도

B=1.6m L=545m

➂ 수량 증·감 현황

공 종 명	규 격	단위	당초	변경	증ㆍ감	비고
가. PCMC 포장	T=4cm	㎡	2,729	1,765	-964
나. 목재데크	보도부	㎡	-	964	964
다. 에폭시 주입	-	개소	-	3,616	3,616
라. 교면방수	침투식	㎡	-	964	964

➃ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
가. 포장공	123,695	80,000	-43,695
나. 목재데크	-	288,180	288,180
순공사비	123,695	368,180	244,485
제 잡 비	29,260	86,955	57,695
물가변동비	-	45	45
도급비	152,955	455,180	302,225

※ 단가적용 : 신규단가는 산출단가에 협의율(100%+65.09%)/2=82.54% 적용재료비는 2015년 7월 적용

노무비는 2015년 상반기 적용

Ⅳ		감리단 검토의견

○ 서울시 걷고 싶은길 중 서울숲~남산길을 연결하는 통로인 용비교 보도부를 이용자들의 정서적 편익증대를 위해 목재데크를 설치하는 것은 적정하다고 사료됨.

Ⅴ		조치계획

○ 감리단 보고내용과 같이 보도부 목재데크로 시공하는 것은 적정한 것으로 판단되어, 우선 시공토록 하고 향후 설계변경심의위원회 결과에 따라 설계변경시 반영하고자 함.

붙  임 : 감리검토의견서 1부.  끝.