문서번호	건축부-8028
결재일자	2015.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
신현성		김충범	07/15 안재혁
협조

『서울특별시 어린이병원』

삼성발달센터 관련 주차장 관련 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부 건축부

『서울특별시 어린이병원』

삼성발달센터 관련 주차장 관련 검토 보고

서울특별시 어린이병원 삼성발달센터 관련 어린이병원 측에서 운영에 지장이 없는 임시주차장 등 공간확보를 요청하고 있어 검토 보고 드림.

□ 개요

위    치 : 서울시 서초구 헌릉로 260

규    모 : 연면적 11,950.88㎡ - 기존지하주차장 재설치 1,475.04㎡ 포함

(지하2층, 지상5층 10,475.84㎡ )

공사기간 : 2015. 1 ~ 2017. 2. (※ 개관 ′17.5예정)

총사업비 : 273억원(시비 73억원, 기부금 200억원)

시    설 : 분야별(심리,미술,음악,인지) 개별, 집단치료실, 문제행동치료실 등

현    황 : 굴토공사 중 (흙막이 시공)

□ 주차장 관련 회의

일  시 : 2015. 7. 7   15:00

장  소 : 어린이병원 원무과 2층 소회의실

내  용 : 임시주차장 등 안전 위한 공간 확보

회의결과 : 임시주차장 30대로는 운영 불가

2중 주차로 인한 접촉사고 ,  대로변 불법주차 문제

지적 장애아로 인한 돌출 행동으로 주차 및 보행 공간 충분 확보 요청

- 별도의 주차 공간 확보 후 공사요구

□  검토 사항

대안제시 (대안 : 정문측 통행로15대 연접, 대지 서측 통행로 8대 연접 주차)

- 어린이병원 정문 측으로 공사장 차량이 출입되고 있으며, 흙막이 토류판

이 목재로 공사장 인접 주차로 인한 붕괴 위험 등 안전관리를 위한 공간

확보가어려워 안전을 고려한 대안을 제시 하였으나 제안 미수용

- 미수용 사유 : 지적 장애인에 대한 보행공간을 별도 확보하여야 하고

주차 장소로는 협소하므로 충분한 안전 활동 가능한 주차 공간 요구

별도 주차공간 검토 (7× 70m 주차공간 – 약 18대 설치 )

-   주차공간 확보를 위하여는 연접된 석축의 안정성을 확보하고 석축 아래측은 공간확보 위한 석축 철거 후 옹벽설치 필요하며 흙막이 부분의 안전성을 별도 확인 요함 (옹벽설치 3개월 소요 예정)

-  안전성 확보는 설계반영된 것과 같이 석축상단은 소일 네일링으로 시공  하고 석축 아래측은 철거 후 옹벽시공 하여야 하며,  설계 미 반영된   흙막이 부분의 안전을 위한 콘크리트월(CIP)로 공사함이 최적 방안임

(CIP로 공사시  깊이 8m  길이 70m 로 0.6m 공으로하며         900m의 시공길이 필요, 공사기간 약3개월 소요 및 공사비추가 예정)

도로 전면 어린이병원측 대지(완화차선 보도)에 주차공간 설치 (약20대)

□ 대 책

어린이병원 측에서 병원 운영을 우선적으로 하여 임시주차장 확보를 요청         하고 있으므로 별도 공간  7× 70m 부분 약 18대를 우선적 공사 실시

어린이병원 전면 보도는 완화차선으로 지정된 어린이병원측 대지로      주차 진입로를 설치 임시 주차장(20대) 우선 활용 : 서초경찰서 등 협의

주차공간 부분에 대하여는 계측관리 지속적 실시 및 안전관련 전문가의    자문 검토 후 위해요소가 있다고 판단될 시 자문결과를 반영하여 안전관리에 철저를 기 하고자 함

지하2층 골조 완료 후 지하2층 상부 스라브가 시공되면 주차공간 활용

(지하2층 상부 스라브는 차량진출입 및 주차공간 활용 가능)

□ 행정사항

주차장 공간을 우선 시공하도록 공사관계자를 지도하고자 하며 가설흙막이 주변 7× 70m 공간이 확보된 후는 안전관련 전문가 자문을 득하고자 함

붙임  1. 현황 사진

2. 임시주차장 현황 및 설치 예정도.  끝.