문서번호	기반시설과-181
결재일자	2015.7.15.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이우헌		한흥태	07/15 박상돈
협조

『2015년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)』
기성금 지급 검토 보고(1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7

시설부

(기반시설과)

『2015년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)』
기성금 지급 검토 보고(1차)

『2015년 한강분수 유지보수 공사(연간단가』시행과 관련 부분 준공에 따라 기성금 지급 요청(1차)이 있어 아래와 같이 검토하고 보고합니다

□ 추진근거

◯『 2015 한강분수 유지보수 사업 추진계획』(‘15.01.26)

◯『 2015 한강분수 유지보수 공사(연간단가)』(‘15.02.17)

- 기성금 지급 요청 : 금회 1차(3~6월)

□ 계약상대자(형진조경(주))

◯ 대 표 자 : 강이호(☏ 592-1545)

◯ 계 약 일 : 2015. 3. 30(계약금액 : *************)

◯ 착공일자 : 2015. 3. 30

◯ 선금지급 : 2015. 4. 24***************

◯ 1차기성신청 : 2015. 7. 14***************

◯ 준공기한 : 2015. 12. 31

□ 공사내용(뚝섬 음악분수외 10개소 유지보수)

◯ 분수노즐 정기․긴급점검 시행후 고장 부품에 대한 철거, 수리, 설치

◯ 고소작업에 따른 차량 및 교통통제, 안전관리 수행

□ 금회 기성 내역

월 별	기 성 내 역	계약금액 (원)	기성신청금액 (원)	계약잔액 (원)	비고
3~6월	정기점검 및 경관램프, 조명등 등 교체ㆍ수리	***********	***********	***********	1차분

공 종	단위	계약수량	기성수량	잔여수량
LED WATER LIGHT 교체	EA	26	24	2
PLC 통신모듈 교체	EA	4	2	2
PLC 프로그래밍 입력(53포인트)	식	1	1	0
SAFETY NOZZLE 교체	EA	2	1	1
SMPS 교체(자재미포함)	EA	15	0	15
SMPS 교체(자재포함)	EA	10	0	10
STS SUBMERSIBLE PUMP 교체	대	1	0	1
WATER CONTROL VALVE COIL 교체	EA	15	14	1
WATER CONTROL VALVE 교체	EA	47	44	3
경관 램프 교체	EA	62	45	17
경관등 PCB교체	EA	6	3	3
경관등 기타부속	EA	25	17	8
고가작업차량(4.5톤 스카이)	일	36	21	15
교통통제 및 안전관리	일	37	21	16
노즐 안전커버 교체	EA	25	25	0
리모트 I/O	EA	2	1	1
리피터 함 설치	EA	19	0	19
마스터 콘트롤러 교체	SET	2	1	1
발레노즐 교체	EA	4	2	2
분수 연출시간표 사인 제작	식	1	0	1
분수 연출프로그램 입력	곡	18	10	8
분수노즐 컨트롤보드	대	5	0	5
수중펌프 스트레이나 교체	M	10	5	5
수중펌프망, 스크린 청소	EA	1	1	0
스윙 구동모터 교체	식	1	0	1
시설 및 시스템 긴급점검	회	27	10	17
시설 및 시스템 점검	회	20	10	10
인버터 수리	대	24	13	11
정류벤 교체	EA	20	15	5
제어반 원격제어시스템 설치	식	1	1	0
제어출력유니트	SET	5	1	4
제트노즐 교체	EA	25	25	0
카고크레인(5톤)	시간	8	0	8
콘트롤 조인트박스 보드 교체	SET	3	2	1
판석 보수	식	2	0	2
하류 리피터 신규 설치	EA	116	0	116

◯ 세부내역

□ 검토의견

『2015년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)』1차 기성금 지급 요청건에 대한 검토 결과 계약상대자인 형진조경(주)은 ‘15.3.27~6.8까지 공사지침서에 의거 뚝섬 음악분수외 10개소 분수시설을 점검하고 고장난 바닥조명등, 노즐, 제어출력유니트, 솔레로이드밸브, 경관램프, 인버터 수리 또는 교체하고 재설치(시운전포함) 하였기에 확인하고 기성 준공 (1차)금을 지급하고자 합니다.

붙임  1. 기성내역서 1부.

2. 유지보수 점검 및 작업일지 1부.

3. 작업사진 1부. 끝.