문서번호	시설과-4179
결재일자	2015.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	★시설과장	관리부장		서울대공원장
이상국	공헌구	심상원		07/15 송천헌
협 조
	총무과장		代백철
	주무관		김현정

들소사방사장정비및구조체 보수보강공사 실정보고에 따른 설계변경 검토보고

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

들소사 방사장정비 및 구조체 보수보강공사』

실정보고에 따른 설계변경 검토 보고

『들소사 방사장정비 및 구조체 보수보강공사』시행 중 시공자가 제출한 실정보고서에 대하여 설계변경 사항을 아래와 같이 검토 보고합니다.

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 들소사 방사장정비및구조체 보수보강공사

□ 공사기간 : 2015. 05. 13 ~ 2015. 07. 16

□ 시 공 자 : 경일건설㈜ 대표 김기명

□ 도 급 비 : 203,546,000원

□ 주요 공사내용

○ 철근이 노출된 콘크리트인조목 울타리보수보강 공사

○ 울타리시설물 외부 도장공사

○ 몰래전망대인 관람데크설치 공사

○ 기타 부대공사 등 등

2		실정보고 및 설계변경

□ 주요 변경사항

○ 울타리 철재물제작 설치 물량증가 (기존:1.92Ton→변경:19.82Ton)

○ 도장면적 증가로 인한 조합페인트 물량추가(기존:0㎡→변경:580㎡)

○ 기존콘크리트 구조체 철거물량 증가 (기존:96m→변경:200m)

○ 공사물량증·감 및 기상악화로 인한 공기연장(15일)

□ 공종별추가 및 변경내용

(단위 : 천원)

공 종 별(공기추가일)	변 경 내 용	소요예산 (개략금액)
∘ 철거공사	∘ 기존 콘크리트 인조목울타리 철거	증 3,871,408
∘ 철근콘크리트 공사	∘ 콘크리트 단면보수 공사	감 46,630,414
∘ 도장공사	∘ 휀스 재도장 물량 감소	감 5,440,257
∘ 목공사	∘ 목재난간, 데크재 물량 감소	감 24,162,696
∘ 가설공사	∘ 가림막 휀스 설치 물량증가	증 3,328,899
∘ 금속공사	∘ 각관, 강관, 잡철물 제직설치 물량증가	증 77,461,051
∘ 2) 경비 ※ 기상악화로 공사중지 (15일)	∘ 간접노무비 ∘ 산재보험료, 고용보험료, 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 안전관리비,환경보전비 ∘ 기타경비 ∘ 일반관리비, 이윤 ∘ 부가가치세	증 17,526,009
합 계 (공기연장 15일 )		증 25,954,000

□ 공사기간 연장

○ 공종별공사내용이 추가발생 및 기상악화발생됨에 따라 공사기간 부족할것으로 판단되므로 공사기간을 연장하는 것이 타당하다고 사료됨

사 업 명	변 경 전	변 경 후	비 고
들소사방사장정비및구조체 보수보강공사	‘15. 05. 13 ~ ’15. 07. 16	‘15. 05. 13 ~ ’15. 07. 31	15일간

3		예 산 현 황

□ 사업비 변경

(단위 : 원)

사 업 명	금 액	계약금액	제1차 설계변경	비 고
들소사방사장정비및구조체보수보강공사	도 급 금 액	203,546,000	229,500,000	증 25,954,000
	이 전 비	-	-	-
	총 공사비	203,546,000	229,500,000	증 25,954,000

□ 예산집행 계획

○ 증가되는 공사비 25,954,000원에 대해서는 “위공사 낙찰차액 ”을 활용 하여 설계변경 계약 추진

□ 예산과목

○ 서울대공원, 공원이용시민만족도 향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 공원시설물유지보수 및 정비, 시설비

4		조 치 의 견

□ 위와 같이 변경내용을 시공자에게 선 시공 지시하고, 공기연장 후 준공시 정산설계변경 시행코자 함. 끝.