투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 한강준설 (저수로, 취수장) 정비공사 (제1회)

1. 치수과-2280(2015.06.29.)호 관련입니다.

2. 「한강준설 (저수로, 취수장) 정비공사」 건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

계 약 현 황	공 사 명	한강준설 (저수로, 취수장) 정비공사
	계약상대자	관악사업(주) (대표 : 이규형)
	계 약 일 자	2015.04.03
변 경 내 역	내 용	계약금액 변경 (증 405,000,000원), 공기변경 없음
	변경사유	한강여객선 안전운항을 위한 수심확보에 따른 추가 준설 등
기 간 변 경	변경전 착공일자	2015.04.08	변경후 착공일자	2015.04.08
	변경전 준공기한	2015.12.03	변경후 준공기한	2015.12.03
금 액 변 경	변 경 전	2,213,000,000 원
	변경금액	(증) 405,000,000 원
	변 경 후	2,618,000,000 원

붙     임 :  1. 계약보증서 1부

2. 도시철도채권매입필증 1부

3. 설계변경내역서 1부

4. 계약의뢰서 1부. 끝.

주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	07/15 이상국
협조자
시행	총무과-11883	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화		/전송		/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개