함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(제2회) 계약 의뢰(2013년 가산동외 9개동 상수도공사)

1. 우리사업소에서 시행 중인 「2013년 가산동외 9개동 상수도공사(장기계속단가계약)」 에 대하여 아래와 같이 설계변경(제2회) 계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2013년 가산동외 9개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요 : 당초 D=13~300㎜, L=1,996m

변경 D=13~300㎜, L=1,996m

다. 공사기간 : 2014.01.01.~2014.06.30.(총공사기간 2013.07.08.~2014.06.30.)

라. 계 약 자 : (주)고황 대표 김미숙

마. 설계변경 내역                                                 (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증.감	비 고
총부기금액	559,452,582	559,452,582	-	계약금액 변경 없음
1차수 금액	219,234,000	219,234,000	-	‘13.7.8.~’13.12.31
2차수 금액	340,218,582	340,218,582	-	‘14.1.1.~’14.6.30.

바. 설계변경 사유 : 공종별 물량 증감

사. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,급수공사비,신설공사비

상수도사업비용,영업비용,급수공사비,개조공사비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선교체비,기타교체비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비

붙임 : 1. 설계변경 시행 1부.

2. 설계변경 검토 보고 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 설계변경 합의서 1부.  끝.

								남부수도사업소장
주무관							남철우				주무관					강동길					급수운영과장					03/10 장시명
협조자
시행			급수운영과-4953										(						)		접수												(						)
우	156-850					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		3146-4546							/전송			316-4589					/	erehwon21@seoul.go.kr													/	대시민공개