함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	강동구청장(사회복지과장)
(경유)
제목	2013년 장애인거주시설(우성원) 기능보강 사업변경 승인 통보

1. 강동구 사회복지과-3665(2014.02.14.)호와 관련입니다.

2. 2013년 장애인거주시설(우성원 생활관 개축공사) 기능보강사업 변경과 낙찰차액 사용 변경을 아래와 같이 승인하오니 해당 시설에 통보하고, 기능보강 사업 지도 감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 사업변경 및 낙찰차액 사용 변경 승인 사항

변경대상	당 초	변 경	증(△)감	비고
면적변경	2,384.02㎡	2,232.52㎡	△151.5㎡	변경면적이 건축허가면적임
사업변경	가전제품 8,164,000원	석면제거비용 8,250,000원	86,000원	증가분 86,000원 자부담으로 충당

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김태성		장애인복지정책팀장	김은순		장애인복지정책과장	03/10 윤재삼
협조자
시행	장애인복지정책과-3483	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-7456	/전송	02-2133-0722	/	ttangi600@seoul.go.kr	/	대시민공개