문서번호	설비부-8621
결재일자	2015.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
박병환		김영수	07/16 박기형
협조

『의주로지하차도 평면화공사-교통신호체계 변경공사』

설계변경 심의결과에 대한 조치 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『의주로지하차도 평면화공사-교통신호체계 변경공사』

설계변경 심의결과에 대한 조치 보고

「의주로 지하차도 평면화공사」와 관련 책임감리원으로부터 염천교 주변 교통신호체계 설계변경 실정보고가 있어 아래와 같이 보고드림.

관련근거

□ 토목부-11481호(2015.06.04) : 설계변경 자문위원회(소위원회) 심의상정

□ 설비부-7052호(2015.06.15) : 제10차 설계변경 자문소위원회 개최

□ 설비부-7281호(2015.06.18) : 설계변경 심의결과 통보

□ 의지 2015-74호(2015.06.29) : 설계변경 자문회의 결과에 대한 조치보고

설계변경개요

□ 공 사 명 : 의주로 지하차도 평면화공사-교통신호체계 변경공사

□ 변경내용 : 염천교 교차로의 교통신호체계(신호등 신설 등) 변경 필요

- 신호등주 신설 9본, 이설 3본, 굴착 배관배선공사 183m 등

□ 설계금액 : 185,899천원

□ 감 리 사 : ㈜삼보기술단

□ 시 공 사 : ㈜천명토건

심의내용 및 검토의견 조치내용

□ 주요 심의내용

∙ 설계내역서(재료비, 노무비), 일위대가, 도면 등의 적정성 여부

∙ 물량산출 및 공량산출의 적정성 여부

□ 검토의견 조치내용 : 별첨 참조

□ 설계변경 심의결과(직접공사비)                          (단위 : 천원)

공 사 명	심의 요청금액	심의결과 조정금액	증 ․ 감	비 고
교통신호체계 변경공사	185,899	137,598	감48,301

보고자 의견

□ 소위원회 검토의견 및 책임감리원 조치결과 보고를 토목부에 통보코자 합니다.

따로붙임 : 설계변경 소위원회 자문 및 조치결과 보고서 각 1부.  끝.