문서번호	방재시설부-9491
결재일자	2015.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	07/16 임춘근
협조
	주무관		임성은

『경의선숲길 공원조성공사』

포장복구 실정보고 검토

2015. 07

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사』

포장복구 실정보고 검토

「경의선숲길 공원조성공사」 염리동 및 연남동 구간 포장복구에 대한

건설사업관리기술단 실정보고 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2015–634(2015.07.09)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : 2013.9 ~ 2016.3

○ 공 사 비 : 11,812백만원

Ⅱ

검토내용

○ 실정보고 사유

① 염리동 교차로 험프 진출입 경사로와 측구설치구간 포장복구 설계반영

염리동 교차로 험프 및 측구설치 구간

연남동(치안센타 골목길) 측구설치 및 포장침하구간

② 연남동(치안센타 골목길) 측구설치 및 포장침하구간 포장복구 설계반영

○ 공사내용

- 포장복구(아스콘 소파보수) 단면도

#78 T=15cm(염리동 험프)	#78 T=20cm(연남동 및 염리동 측구구간)

- 시공수량

· 포장복구(아스콘 소파보수) 104㎡

· 아스콘 포장깨기 및 폐기물상차 1.88㎥

· 아스콘 포장절단 15cm

○ 신규 단가적용 검토

- 2015년도 표준품셈 적용

- 2015년 상반기 노임, 2015년 6월 자재 적용

- 2015년 6월 유류대 및 기계경비 적용

- 낙찰율 80.013%

○ 공사비 검토

(단위 : 천원)

구 분	규 격	금 액	비 고
순공사비		6,215
1) 포장공	포장복구 아스콘	6,165
2) 철거공	포장절단 및 깨기	50
2. 제잡비		1,887
3. 공급가액		8,102
4. 부가가치세		810
5. 도급액		8,912
6. 폐기물처리비	운반 및 처리	90	별도발주
7. 총사업비		9,002

Ⅲ

건설사업관리기술단 검토의견

○ 상기와 같이 『경의선숲길 공원조성공사』 염리동 및 연남동 구간 포장복구(아스콘) 실정보고에 대하여 검토한 결과 설계 미 반영된 포장복구 비용에 대하여 설계 반영함은 공사계약일반조건에 의거 타당하며,

○ 공사비 산출 검토 결과 수량 및 단가등은 관련 규정에 의거 적절하게 반영된 것으로 판단됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 『경의선숲길 공원조성공사』 설계 미 반영된 염리동 및 연남동 구간 포장복구 실정보고에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인통보하여 차후 설계변경 시 반영토록 조치하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.