문서번호	문화정책과-3033
결재일자	2014.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	문화정책팀장	문화정책과장
장희춘	강석	03/10 정헌재

『윤극영 반달 할아버지 집』

리모델링 공사계획(안)

2014. 3

문화관광디자인본부

(문화정책과)

『윤극영 반달할아버지 집』

리모델링 공사계획(안)

서울 미래유산 보존 사업으로 우리나라 대표적인 동요작사·작곡가인「윤극영 가옥」을 리모델링하여 전시관 등 문화공간으로 활용하고자 함

Ⅰ		추진근거 및 배경

□ 추진근거

○ 현대 유산의 미래유산화 기본구상(시장방침 제192호, ’12.6.5)

○ 윤극영가옥 매입 및 활용계획 수립(본부장 방침 ‘13.7.12)

○ 윤극영가옥 조성을 위한 설계용역 시행계획(본부장 방침 ‘13.10.4)

□ 추진목적

○ 일제 강점기 창작 동요의 선구자로서, 어린이 문화운동과 작사·작곡 운동을 전개한 윤극영 선생이 거주하고 돌아가신 가옥 보존

- 윤극영선생 말년 거주(’77~’88년, 11년거주)가옥, 1970년도 건축

※ 윤극영(1903~1988)선생, 우리나라 최초 동요곡집인 ‘반달’제작 등 어린이문화운동 전개

○ 역사적, 문화적 보존가치가 있는 역사적 공간을 살아있는 교육․

문화․관광 자원으로 활용

Ⅱ		시설현황 및 추진경과

□ 시설현황

○ 위  치 : 강북구 인수봉로 84길 5(수유동 566-26)

○ 면  적 : 대지 205(62평)㎡, 연면적 99.8(30평)㎡(지상1층)

○ 구  조 : 단독주택, 연와조(1970.1.25 준공)

○ 용  도 : 단독주택(정원, 방4, 거실, 주방, 욕실, 창고)

○ 소  유 : 서울시(`13.12.13 소유권 이전)

정 원

마당

현관

방-1

거 실

안 방

방-2

방-3

다락방

현 관

정 원

《 건물외부 》                      《 내부 평면도 》

□ 추진경과

○ `13. 7.12        윤극영가옥 매입 및 활용계획 수립

○ `13. 8. 6         윤극영가옥 매매계약 체결

○ `13. 8.13        윤극영 반달 할아버지집 민간위탁계획 수립

○ `13.10. 4        윤극영가옥 조성을 위한 설계용역 시행계획

○ `13.10~`14.1    정밀안전진단 및 리모델링공사 실시설계

○ `13.11~`14.1    유물 기증계약서 체결 및 목록화 작업

○ `13.12.13        윤극영가옥 소유권이전 등기완료

○ `13.12.20        민간위탁 시의회 동의

Ⅲ		조성사업 계획

□ 추진방향

○ 가옥의 원형을 보존하고, 인위적 시설 변형 최소화

○ 전시 및 시민문화프로그램 운영을 위한 편의시설 보완

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 「윤극영 반달할아버지 집」리모델링 공사

○ 공사기간 : 2014. 4월 ~ 6월

○ 공사면적 : 99.80㎡(지상1층 바닥면적)

○ 공사내용 : 실내 리모델링, 기계설비, 전기·통신공사, 실외공사

○ 소요예산 : 255,145천원

□ 세부 사업내용

○ 실내 리모델링 공사 : 전시실, 다목적실, 수장고, 사무실 등

<현 용 도>			<변경 용도>			<활 용 계 획>
거실 (21.40㎡)			전시실 1			유작품 전시 및 설명 공간
방-1 (10.08㎡)			전시실 2			생전 거주 모습 재현 공간
안방 (15.40㎡)			다목적실 (세미나실)			동요 교육프로그램 등 시민참여 프로그램 운영
방-2 (10.65㎡)			사무실			관리사무실
방-3 (10.42㎡)			수장고			유작․생활품 등 보관(전용 출입문)
식당 (10.70㎡)			휴게실			다과 및 휴게 공간
기타			기 타			화장실, 주방, 창고, 다락방, 물치

<현 용 도>			<변경 용도>			<활 용 계 획>
주차장 및 정원			정원조성 (조경수 식재)			커뮤니티 공간
지붕			지붕			기와 전면 교체(방수등 건물보호)

○ 실외공사 : 지붕전체 보수 및 기와교체, 정원 조경수 식재

○ 기계설비 공사 : 냉·난방설비,위생설비

○ 전기 공사 : 실내외 전기배선 및 조명 재설치

○ 통신 공사 : 전화 및 통신배선 재설치

※ 공간 배치도 별첨

Ⅳ		행정사항

□ 공사발주 및 용도변경

○ 공사발주(공사․감독)의뢰                  <도시기반시설본부>

○ 건축물 용도변경(주택 ⇒ 문화시설)         <강북구청 건축과>

□ 소요예산 : 255,145천원

○ 산출내역

(단위 : 천원)

구분	건축공사	기계설비공사	전기공사	통신공사
공사비	189,268	20,668	33,095	9,219
분담금		1,045 (시설분담금)	1,850 (한전불입금)
합계	189,268	21,713	34,945	9,219

○ 예산과목 : 문화정책과, 문화도시서울구현, 문화향유공간 및 문화기반시설
조성, 미래유산 보존 및 활용사업, 시설비(401-01)

Ⅴ		향후 추진일정

○ `14. 3월        공사의뢰(문화정책과 → 도시기반시설본부)

○ `14. 3월        공사발주(도시기반시설본부)

○ `14. 4~6월     리모델링 공사 시행

○ `14. 4월        민간위탁 운영단체 선정

○ `14. 7월        리모델링 공사 완료 및 개관

붙임 : 1. 전시관 실내외 배치도(전, 후) 1부.

2. 실시설계 도면 파일 각 1부.

3. 공사비 내역서 각 1부. 끝.