투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(1회) 의뢰(2015년 관내포장도로 굴착복구공사(연간단가)-북부

우리사업소에서 시행중인 『2015년 관내포장도로 굴착복구공사(연간단가)-북부』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회) 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가)-북부

나. 공사기간 : 2015. 03. 10 ~ 2015. 12. 31

다. 도 급 자 : ㈜KGR TECH  대표 권 재 평숙

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비		1,904,352,600	1,904,352,600	-
도급비	공급가액	543,956,910	725,775,091	증) 181,818,181
	부가가치세	54,395,690	72,577,509	증) 18,181,819
	계	598,352,600	798,352,600	증) 200,000,000
관 급 비		946,000,000	946,000,000	-
이 전 비		360,000,000	160,000,000	감) 200,000,000

마. 설계변경사유 : 관리청 굴착복구 수량 증,감에 따른 설계변경

바. 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사,

시설비및부대비, 시설비

첨부 : 설계변경(1회) 관련도서 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	최완		도로보수과장	07/16 이석재
협조자
시행	도로보수과-6963	(		)	접수		(		)
우	141-060	서울시 강북구 한천로 913(번동) 북부도로사업소 도로보수과 별관2층	/
전화	02-944-5436	/전송	02-945-5072	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개