투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰[남부순환로(개봉역 앞) 구조개선 전기공사 - 총차 및 5차]

1. 설비부-8610(2015.7.16.)호와 관련입니다.

2.『남부순환로(개봉역 앞)구조개선 전기공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 남부순환로(개봉역 앞)구조개선 전기공사

나. 공사개요 : 수변전설비공사 1식, 가로등 및 지하차도 설비 1식, 신호등 1식

다. 도 급 자 : 정안전기(주)외 1사

라. 준공기한 연기의뢰 현황

구 분	준공기한		도 급 비		비 고
	당 초	변 경	당 초	변 경
총차	‘15.07.31.	‘15.10.31.	1,224,803,500원	1,224,803,500원	금액 변동 없음
5차	‘15.07.31.	‘15.10.31.	533,844,450원	533,844,450원

마. 귀책소재 및 연기사유

1). 연기에 따른 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

2). 지체상금 부과여부 : 미부과

3). 연기사유 : 선행공종인 토목공사의 공사지연에 따른 전기공사 기간 연장

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 검토보고 1부.

3. 준공기한 연기 감리 검토의견서 1부.

4. 준공기한 연기 합의서 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김현욱		환경설비과장	유병기		설비부장	07/16 박기형
협조자
시행	설비부-8634	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 무교동 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8621	/전송	02-3708-8659	/	hyunkim@seoul.go.kr	/	대시민공개