투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	실정보고(2차) 검토결과

1. 서울특별시시설관리공단 공감감독3처-6431(‘15.7.14) “공사 실정보고서 제출(분뇨 악취방지시설 보완공사-2차)”호와 관련입니다.

2. 우리센터 “분뇨 악취방지시설 보완공사”와 관련하여 실정보고서를 검토하고 아래와 같이 조치코자 합니다.

가.  실정보고 내용

◯ 주요내용

- 옥외 매설배관의 일부구간(지장물) 자재변경(GRP배관 → STS배관)

- 종합설비동 기존배관 철거 및 재설치, 이송펌프 기초 보강

- 이송배관 처짐현상 방지위해 지지대 추가 설치 및 기초 크기 변경

- 공동구내 GRP배관 설치시 경로가 상충되는 소화슬러지 이송배관을 옥외로 경로변경하여 설치

- 옥외 토목공사시 지장물 발생으로 설계내역 변경

· 굴착폭 1.95m → 1.2m, 굴착깊이 1.5m → 1.1m,

· 기층부분 무근콘크리트 포장

- 설계누락된 건설폐기물 상차비용 계상

*******************************************

***************************************************

나. 검토 내용

◯ 현장상황에 맞게 보고서 내용대로 공사시공 필요

◯ 계약내역서 변경 등은 공사 진행사항 반영하여 추후 *********

다. 조치의견 : 감독부서(시설관리공단) 의견대로 승인.

첨부 : *********** 끝.

지방환경사무관대우	하병문		슬러지재활용과장	07/16 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-5392	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 차장터 5길(송정동 73)	/
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	부분공개