투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(1차1회) 시행 및 준공기한 연기 의뢰

1. 우리부에서 시행중인 『잠원2빗물펌프장신설공사 외 1개소 전면책임감리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차1회) 및 준공기한 연기를 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 잠원2빗물펌프장신설공사 외 1개소 전면책임감리용역(1차분)』

나. 도 급 비 : 전체 1,108백만원(1차분 : 628백만원)

다. 용역기간 : 2013.04.01 ∼ 2014.09.30(1차 2013.04.01 ∼ 2014.03.11.)

라. 도 급 자 : 신명건설기술공사 외 2개사

마. 예산과목 : 수방대책사업, 잠원빗물펌프장시설용량증대, 시설비및부대비, 감리비

바. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
전체분	1,108,750,000	1,108,750,000	변동없음
1차분	628,000,000	628,000,000	변동없음	내역변경

- 변경사유 : 공정에 따른 감리원 배치계획 조정에 의한 내역변경

사. 준공기한 연기[1차분]

○ 연기사유 : 공정에 따른 감리원 배치계획 조정에 의한 준공기한 연기

○ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
1차분	2013.04.1 ~ 2014.03.11	2013.04.01 ~ 2014.06.10

1) 연기사유 귀책소재 : 서울시도시기반시설본부

2) 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(1차 1회)

3. 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이병환		치수시설과장	서관석		방재안전시설부장	03/10 박종웅
협조자
시행	방재안전시설부-3659	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개