투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(918공구 건설공사, 총괄4회 및 7차1회)

1. 우리 본부에서 시행중인 『서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사』에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

나. 계 약 자 : ㈜SK건설공사 대표이사 조기행

다. 변경내용

(단위 : 백만원)

구분	계약금액			용역기간	비고
	당초	변경	증감
총괄4회	140,389	140,389	-	2010.02.19. ~ 2016.02.17. (변경없음)
7차1회	21,500	21,500	-	2015.02.13. ~ 2015.12.31. (변경없음)

라. 변경사유

- 사유지 하부통과 및 충적층구간 터널의 안전성을 확보하기 위한 공법변경에 따른 내역(물량)조정

바. 예산과목

- 특별회계 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설,                                 시설비및부대비, 시설비.

붙임  1. 내역조정에 따른 검토 보고 1부.

2. 설계변경 감리검토서 1부.

3. 변경설계서(총괄4회, 7차1회) 각 1부.

4. 합의서(총괄4회, 7차1회) 1부.

5. 관련공문 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	서재원		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	07/17 김진팔
협조자	주무관	문병종		경리과장	박환		기획예산과장	代백광진
시행	도시철도토목부-9082	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8, 9층(무교동)	/
전화	02-772-7125	/전송	02-772-7306	/	seojw83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)