투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	운영총괄과장
(경유)
제목	변경계약체결통보 - 2014년 뚝섬문화콤플렉스 시설물 관리 용역

1. 운영총괄과-314(2015.07.10.)호 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

계 약 현 황	용 역 명	2014년 뚝섬문화콤플렉스 시설물 관리 용역
	계약상대자	엠에이치환경(주) (대표 : 김미화)
	변경계약일자	2015.07.13.
변 경 내 역	내 용	계약금액 변경 (증 9,110,050원), 계약기간 변경
	변경사유	용역 공백 방지 (입찰공고기간, 대상자 선정 및 인수인계 기간 고려)
기 간 변 경	변경전 착수일자	2014.07.15.	변경후 착수일자	2014.07.15.
	변경전 완수일자	2015.07.14.	변경후 완수일자	2015.07.25.
금 액 변 경	변 경 전	199,349,500 원
	변경금액	(증) 9,110,050 원
	변 경 후	208,459,550 원

붙     임 : 변경계약체결통보서 1부. 끝.

	총무부장
주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	07/17 이상국
협조자
시행	총무과-12020	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화		/전송		/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개