문서번호	토목부-14829
결재일자	2015.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상욱		권혁대	07/17 노우성
협조
	주무관		강철규

지하차도명패 설치 검토보고

(의주로 지하차도 평면화공사)

2015. 7.

도시기반시설본부

(토목부)

지하차도명패 설치 검토보고

(의주로 지하차도 평면화공사)

서울디자인위원회 공공디자인 심의(2010)에서 결정된 서체, 재질, 색채 등을 반영한 명패를 의주로 지하차도에 설치하기 위한 검토보고임

Ⅰ		관련근거

○ 의지2015-75(2015. 7. 3.) 실정보고(지하차도 명패 설치)

○ 2010.11.29. 서울디자인위원회 공공 디자인 심의 3차

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 중구 순화동 120번지 ∼ 봉래동 126-2번지

○ 규    모 : BOX구간 70m, U-Type옹벽 180m, 토공되메우기 198m

○ 공사기간 : 2015. 2. 4.∼ 2015.12.31.

○ 도 급 비 : 1,424백만원

○ 감 리 사 : 삼보기술단  ○ 시 공 사 : ㈜천명토건

Ⅲ		감리단 보고내용

□ 지하차도 명패 설치

➀ 검토사유

- 서울 디자인위원회 공공 디자인 심의 3차(2010.11.29.) 의결 된 명패를 지하차도 진입부 상단부 설치

➁ 검토사항

구 분	의 결 사 항	비 고
서 체	서울남산체EB	반영
재 질	Stainless Steel	반영
색 채	고궁갈색_Seoul Red	반영
가공방식	레이저 커팅	반영
부착방식	플로팅 방식(앵커처리)	반영

➂ 최종 검토안

지하차도 진입부

➃ 수량 증·감 현황

공 종 명	규 격	단위	당초	변경	증ㆍ감	비고
지하차도 명패
한 글	Stainless Steel (분체도장)	EA	-	7	7
영 문		EA	-	15	15

➄ 공사비 증·감 현황                            (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
1. 한 글	-	1,015	1,015
2. 영 문	-	1,350	1,350
제 경 비	-	825	825
공 급 액	-	3,190	3,190
부 가 세	-	319	319
도 급 액	-	3,509	3,509

※ 단가적용 : 2015년도 표준품셈, 낙찰률 86.753% 적용

Ⅳ		조치계획

○ 감리단 보고내용과 같이 의주로 지하차도 진입부(상단) 명패 설치는 적정한 것으로 판단되어, 우선 시공토록하고 향후 설계변경시 반영 조치하고자 함.

붙  임 : 감리검토의견서 1부.  끝.