문서번호	서울숲공원관리사무소-4189
결재일자	2015.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	서울숲공원관리사무소장		동부공원녹지사업소장
김윤수	현호재	배정복		07/20 代서동선
협 조
	주무관		이전호

서울숲공원 노후목재시설 정비 계획

2015. 7.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

서울숲공원 노후목재시설물 정비 계획

서울숲공원 내 노후되고 부식된 목재시설물을 정비하여 안전사고 예방 및 이용객 불편이 없도록 다음과 같이 정비 추진코저 함.

Ⅰ		추진방향

▢ 안전사고 우려가 있는 목재시설물 우선정비

▢ 시민불편이 최소화토록 공원이용 비수기에 정비시행

Ⅱ		추진개요

▢ 기    간 : 2015.7. 20 ~ 9. 11

▢ 대    상 : 보행가교 상판데크 등 4개시설

○ 보행가교 상판데크(W2700×L2000) : 225m

⇒ 보행가교 상판데크만 교체

○ 바람의언덕 전망데크 : 144.5㎡

⇒  전망데크 상판 및 멍에, 장선을 목재에서 각관으로 바꾸어 재설치

○ 물놀이터 공중걷기 : 1개소

⇒  노후로 인해 철거완료된 시설을 재설치

○ 물놀이터 퍼걸러지붕(4200×4200) : 1개소

⇒  노후된 퍼걸러지붕을 전면교체

▢ 소요예산 : 160,000천원

○ 정비공사 : 110,000천원

- 서울숲공원 시설물정비 시설비 활용

○ 관급자재(하드우드데크) : 50,000천원

- 서울숲공원 및 산하공원관리 재료비 활용

▢ 방    법 : 전문시공업체에 위탁시공

※ 계약방법 : 전자공개수의계약

Ⅲ		추진계획

▢ 2015. 7. 20 ~ 7. 31 : 자체설계 및 발주

▢ 2015. 8. 01 ~ 8. 10 : 입찰공고

▢ 2015. 8. 11 ~ 9. 11 : 정비공사시행

Ⅳ		기대효과

▢ 노후시설물 정비로 시민불편 및 안전사고 예방

▢ 기존시설의 문제점을 보완하여 재정비함으로써 시설물의 내구성 강화 및 내구연한 증대에 기여

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.