서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	구조장비(라이트라인) 수리계획 변경보고(납품기한 연장)

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난업무가이드 안전지원행정편 「소방장비 운영 및 관리 내실화」

나. 현장대응단-4013(2015.6.10.)호 「구조장비(라이트라인) 고장발생 및 수리계획 통보」

다. 재난관리과-4647(2015.6.22.)호 「구조장비(라이트라인) 수리 계획보고」

2. 위와 관련, 우리서 현장대응단(구조대) 관리운용 중인 라이트라인 인버터 등
고장으로 인한 수리계획을 다음과 같이 변경하고자 합니다.

가. 대    상 : 라이트라인(NL-100) 1점

나. 고장내역 : 이엘와이어 쇼트부 및 인버터 교체

다. 산출금액 : 금330,000원(금삼십삼만원) - 부가세 포함

라. 예산과목 : 특수구조장비보강및유지관리비 / 사무관리비(201-01)

마. 계 약 일 : 2015. 6 .19.(금)

사. 업    체 : 니즈텍(경기 광주 소재, ☏ 031-768-6593, 대표자 : 김영남)

아. 결재방법 : 재난관리과 법인카드

자. 납품기한

변경 전	변경 후	사유
2015.7.15(수)	2015.7.31(금)	업체의 부품 수급 등의 문제로 인한 납품일 변경

차. 검 수 자 : 소방교 권택순, 소방사 강성현

붙임  1. 구조장비운용 관리카드 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.

4. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	권택순		구조팀장	박주경		재난관리과장	전결 07/20 김종구
협조자
시행	재난관리과-5399	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-793-2273	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개