문서번호	기전설비과-281
결재일자	2015.7.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김병훈		김남수	07/20 박상돈
협 조
	주무관			김동식

공사실정보고 검토보고

(한강공원 낙천정 나들목 신,구 전기공사)

2015. 7.

한강사업본부

(기전설비과)

공사실정보고 검토보고

(한강공원 낙천정나들목 신,구 전기공사)

우리본부에서 장기계속 공사로 시행중인「한강공원 낙천정나들목 신, 구  전기공사」와 관련하여 감독기관(서울특별시시설관리공단)이 제출한 공사실정보고서에 대하여 검토보고 드림.

관련근거

공사감독3처-6560(`15.7.16)호 : 공사실정보고

공사현황

공 사 명 : 낙천정 나들목(신,구) 전기공사

공사개요

- 위 치 : 광진구 자양동 672

- 규 모

○ 낙천정나들목(신)

ㆍ전기수전 및 분전반신설  2면

ㆍ조명등(LED)설치 71등 및 배관배선

○ 낙천정나들목(구)

ㆍ전기수전 및 분전반신설  1면

ㆍ조명등(형광등→LED)교체 33등 및 배관배선

계약금액 : *************

계약업체 : ************

공사기간 : 2015. 03. 23 ~ 2015. 07. 31

공사감독 : 서울시시설관리공단

검토내용

공 종	현황 및 문제점	감독부서 의견 및 대책	순공사비 증감 (천원)	비고
구 나들목	○구 나들목 토목공종이 포장공사 진행으로 전기작업을 병행할 수 없고, 토목에서 교통통제가 7월 20일까지로 그 위후 작업을 위해서 별도 교통통제후 작업을 진행하여야 함. 이에 시공사 준공연기 신청을 함.	●구 나들목의 안전한 개통을 위해서는 나들목 내부에 적정조도를 확보한 후 가능하기 때문에 추가 교통통제후 작업 진행하여야 함.	변경없음

보고자 의견

감독기관에서 제출한 보고 사항을 검토한 결과, 선행공종(토목공사)의 지연으로 인해 후속으로 진행하여야할 전기공사가 현장여건(교통통제)에 따른 공사기간이 부족하여 준공기한을 토목공사와 동일하게 연기(2015. 9. 30)하여 안전하고 고품질의 나들목을 시민에게 제공하고자 함.

귀책사유 : 한강사업본부

준공기한 변경

- 당  초 : 2015. 3. 23. ~ 2015. 7. 31.

- 변  경 : 2015. 3. 23. ~ 2015. 9. 30.

향후계획

총무과에 준공연기 요청

설계변경심의 및 예비준공검사

설계변경 및 준공검사

붙임 : 1. 실정보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 공사계약서 1부.   끝.