문서번호	주차계획과-9691
결재일자	2015.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주차시설팀장	주차계획과장
금종융		김종상	07/20 윤보영
협조

독서근린공원 지하주차장 건설 (양천구) 예산교부 검토

2015. 7.

도시교통본부

(주차계획과)

독서근린공원 지하주차장 건설 예산교부 검토

양천구에서 추진중인『독서근린공원 지하주차장 건설사업』관련 ‘15년 예산편성된 주차장 사업비(시비) 교부 요청함에 따른 검토결과 보고

Ⅰ. 사업개요

○ 위    치 : 서울특별시 양천구 신월동 987 독서근린공원

○ 규    모 : 대지면적 3,980㎡ (연면적 8,412㎡)

- 공영주차장 : 지하3층, 주차면수 250면

○ 총사업비 : 14,572백만원 (시비 8,743백만원, 구비 5,829백만원)

○ 사업기간 : ‘10.7 ~ ‘15.12.

Ⅱ. 추진 경위(계획)

○ ‘10.7.25 : 주차장 건설계획 수립(양천구)

○ ‘12.7.27 : 시 도시공원위원회 자문

○ ‘12.9.27 : 시 투융자심사

○ ‘13.12.23 : 기본 및 실시설계용역 준공

○ ‘14.2.20 : 시 계약심사 완료

○ ‘14.5.15 : 공사착공(토목)

○ ‘15.6.30현재 : 지하2층 철근콘크리트 공사 진행중

○ ‘15.9 : 전기,정보통신,조경공사 진행 (공정: 62%)

○ ‘15.11 : 토목공사 완료

Ⅲ. 세부 검토 내역

□ 독서근린공원 지하주차장 건설 예산 교부

- 관련공문 : 2015년 주차장건설사업 시비보조금 배정요청

: 양천구 교통지도과-13378호 (2015.7.1)

□ 주차장 분야별 사업비 (단위: 백만원)

구 분		사업비	시 비	구 비	발주시기	비 고
계		14,572.3	8,743.0	5,829.3
보상비	보 상	-	-	-		해당없음
설계용역	설계용역	338.5	203.1	135.4	‘12.12	준공금액
공사발주	토목,건축	9,606.5	5,763.9	3,842.6	‘14.5	발주금액
	전 기	751.9	451.1	300.8	‘14.5
	소방전기	221.1	132.7	88.4	‘14.5
	통 신	332.2	199.3	132.9	‘14.5
	폐 기 물	49.6	29.8	19.8	‘14.5
	조 경	479.7	287.8	191.9	‘14.5
감리비	시공감리	576.9	346.1	230.8	‘14.5
예비비		2,215.9	1,329.2	886.7

□ 예산배정 검토

○ 사업비 배정 현황(자치단체 자본보조, 단위: 백만원)

구 분	계	‘14년이전	‘15년			‘16년이후	비고
			계	기배정	금회배정
계	14,572	11,049	3,523	-	3,523	-
시 비	8,743	5,220	3,523	-	3,523	-
구 비	5,829	5,829	0	-	0	-

□ 요청 사유

○ 전기, 정보통신, 조경공사 발주시기 도래 및 관급자재비 지급 등에 따른 시비배정 요청

□ 검토 의견

○ 동 사업은 ‘14.5월 공사착공되어 현재 지하2층 철근콘크리트 공사 진행중으로 주차장 사업은 정상적으로 추진중인 것으로 판단되며 (공정 62%)

○ 건설공사 집행에 필요한 ‘15년 편성된 시비 3,523백만원 요청하는 사항으로 공사가 원활하게 이루어질 수 있도록 예산배정함이 타당하다고 사료됨.

첨부   1) 예산교부 요청공문 1부

2) 공사예정공정표 1부.   끝.