투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강남순환도시고속도로건설공사(8공구) 책임감리원
(경유)
제목	신규단가 협의

1. 동기강제2015-391호(2015.07.16)호와 관련입니다.

2. 강남순환도시고속도로건설공사(8공구) 조경공사 실정보고 관련 신규비목(느티나무 제거)에 대하여 강제협의율(79.85%)을 적용하였으나 공사계약일반조건 제20조에 따라 낙찰율(59.71%)로 적용코자 협의 하오니 의견이 있으시면 2015.07.23까지 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	임봉규		조경시설과장	신용우		방재시설부장	07/20 임춘근
협조자
시행	방재시설부-9660	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울시 중구 청계천8 프리미어플레이스 빌딩14층 도시기반시설본부	/
전화	02-3708-8795	/전송	02-3708-8756	/	lbg98909@seoul.go.kr	/	대시민공개