투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(1회)-세종로 차도구간 일상유지보수공사

우리사업소에서 시행중인 2015년 세종로 차도구간 일상유지보수공사(연간단가)에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 세종로 차도구간 일상유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2015. 04. 21 ~ 2015. 12. 31

다. 도 급 자 : ㈜자오건설  대표 이기완

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증, 감
총 공 사 비		439,535,900	680,000,000	증)240,464,100
도급비	공 급 가 액	333,221,728	525,283,637	증)192,061,909
	부가 가치세	33,322,172	52,528,363	증) 19,206,191
	계	366,543,900	577,812,000	증)211,268,100
관 급 비		72,992,000	102,188,000	증) 29,196,000
이 전 비		-	-	-

마. 설계변경사유 : 돌포장의 지속적 파손으로 인한 발주유보액 및 집행잔액 사용

바. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노후포장도로 정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.   끝.

주무관	이화신		도로보수과장	이석재		북부도로사업소장	07/20 노영석
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-7062	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 913 (번동) 북부도로사업소 도로보수과	/
전화	944-5430	/전송	945-5072	/	hwas44@seoul.go.kr	/	대시민공개