투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	[낙천정 나들목 신,구 전기공사] 준공기한 연기 요청

우리본부에서 시행하고 있는『낙천정 나들목 신,구 전기공사』와 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사기한 연기 내역

계 약 건 명	계 약 업 체	계 약 일 자	당 초 준공일자	변 경 준공일자	계약번호
낙천정나들목 (신,구) 전기공사	***** ******	2015.3.23.	2015.7.31.	2015.9.30.	20150349214

나. 지체상금 부과여부(부과, 미부과) : 미부과

다. 변경(연기)사유 : 선행공종(토목공사)의 지연으로 인해 후속으로 진행하여야할 전기공사가 현장여건(교통통제)에 따른 공사기간이 부족하여 준공기한을 토목공사와 동일하게 연기(2015. 9. 30)하여 안전하고 고품질의 나들목을 시민에게 제공하고자 함.

붙임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기보고서 1부.

4. 공사계약서 사본 1부.  끝.

	기전설비과장
주무관	김병훈		기전설비과장	07/20 김남수
협조자
시행	기전설비과-284	(		)	접수		(		)
우	133-820	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 기전설비과	/
전화	02-3780-0659	/전송	02-3780-0744	/	skbhoon@seoul.go.kr	/	부분공개