투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 낙천정 나들목 (신,구) 전기공사

1. 기전설비과-284(2015.07.20.)호 관련입니다.

2. 「낙천정 나들목 (신,구) 전기공사」 건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

계 약 현 황	공 사 명	낙천정 나들목 (신,구) 전기공사
	계약상대자	(주)종성테크 (대표 : 임성규)
	계 약 일 자	2015.03.23
변 경 내 역	내 용	준공기한 연장, 계약금액 변경 없음
	변경사유	선행공종(토목공사) 지연에 따른 공기부족으로 준공기한 연장
기 간 변 경	변경전 착공일자	2015.03.23	변경후 착공일자	2015.03.23
	변경전 준공기한	2015.07.31	변경후 준공기한	2015.09.30.
금 액 변 경	변 경 전	139,718,310 원
	변경금액	-
	변 경 후	139,718,310 원

붙     임 :  1. 계약보증서 1부

2. 합의각서 1부

3. 계약의뢰서 1부. 끝.

주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	07/21 이상국
협조자
시행	총무과-12188	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화		/전송		/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개(7)