서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	「천호대로(광나루역) 확장」사업비 재배정 관련 협조 요청

1. 도시기반시설본부 설비부-8375(2015.7.10.)호와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 추진하고 있는「천호대로(광나루역) 확장」사업과 관련하여 도시기반시설본부 설비부에서 요청한 재배정 예산 변경 및 중앙버스전용차로 설계를 위해 기 재배정한 사업예산에 대하여 아래와 같이 협조 요청합니다.

3. 아울러, 기 재배정 예산 변경(감재배정)을 위하여 e-호조상에서 감원인행위를 해주시기 바랍니다.

가. 기 재배정 예산 변경내역

(단위 : 천원)

구분	기 재배정액	금회 재배정액	누계 재배정액	비 고
계	11,703,000	-100,000	11,603,000	교통운영과
토목부	11,575,900	212,000	11,363,900	감재배정
설비부	127,100	112,000	239,100	추가 재배정

나. 변경사유

1) 도시기반시설본부 설비부(소요예산 112,000천원)

- 3단계 교통전환 관련 합동 현장순시 시 검토사항(비상호출시스템 추가 설치) 처리를 위한 추가예산 필요

2) 교통운영과(소요예산 100,000천원)

- 사업구간 중앙버스전용차로 기본(보완) 및 실시설계 용역 발주를 위한 소요예산 필요

다. 예산과목 : 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스 이용제고, 천호대로 중앙버스전용차로 확충 및 도로확장, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙임 : 도시기반시설본부 설비부 요청공문(사본) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이민호		중앙차로팀장	이병운		교통운영과장	07/21 강진동
협조자
시행	교통운영과-14035	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 교통운영과	/
전화	02)2133-2476	/전송	02)2133-1054	/		/	대시민공개