투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(하천관리과장)
(경유)
제목	사업계획변경 조정위원회 심의 재요청(용두3 빗물펌프장)

1. 방재시설부-6515호(2015.5.15.)호 관련 입니다.

2.『용두3 빗물펌프장 신설공사』과 관련하여 귀부서에서 시행한 펌프장 재설계에 따른 현장 조사결과 지장물(상수도 900mm 외 3건) 이설비가 추가로 발생하여 총사업비 증액(약20억)이 예상되어 지난 5월 15일 사업계획변경조정위원회 심의를 요청하였으나 현재까지 심의가 이루어지지 않아 재요청 하오니,

3. 지장물 이설일정(2015. 8 ~ 10)을 고려하여 내년도 수방에 대비될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공사추진 일정

· 15. 8 ~ 15.10.15 : 지장물이설

· 15.10.15 ~ 16.02.28 : 펌프장 가시설 및 구조물공

· 16.02.28 ~ 16.04.30 : 펌프설치 및 전기인입

· 16.04.30 ~ 16.05.30 : 부대토목 및 포장완료.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	노태학		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	07/21 임춘근
협조자	주무관	장수철
시행	방재시설부-9696	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 무교동 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개