문서번호	기전과-4991
결재일자	2015.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
차준원		07/21 최주용
협 조
	주무관		이명호

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

감리 실정보고서 검토 보고(신내로 가로환경-신호)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07

성동도로사업소

(기 전 과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

감리 실정보고서 검토 보고

교통안전시설물 원인자 부담공사 실정보고서 검토 요청이 있어 관련서류 및 현장 확인후 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ

관 련 근 거

㈜영호이앤씨 영원15-07-07호(2015.07.20.)

Ⅱ

공 사 개 요

공 사 명 : 신내로 가로환경개선사업 교통안전시설물 설치공사(신호)

공사구간 : 중랑구 신내로 211

공사기간 및 공사참여자

구분	공사기간	원인자	공사참여자			공사물량
			설계사	감리사	시공사
신호	2015.06.10~2015.07.30	중랑구청 도로과	㈜영호이앤씨		대영트래픽㈜	지주 이설 1본, 차량등 이설 2조, 보행등 이설 1조 외 기타 1식

Ⅲ

기술검토서 검토결과

위치	현황 및 문제점	감리 의견	검토결과
신내로211	-현장여건상 자전거 도로에 맨홀신설시 안전사고 발생우려 -기존 맨홀을 사용하여 시공	-맨홀 신설 물량 삭제 -기존 맨홀 사용하여 전선관 1열 설치	현장여건 변경으로 물량변경, 감리의견이 타당함.

붙     임 : 1. 감리 실정보고 제출 1부. 끝.