함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(송수펌프실 강제환기시설 설치공사)

우리센터에서 시행하는 『송수펌프실 강제환기시설 설치공사』에 대하여 설계변경 심의를 개최하고 아래와 같이 설계변경 시행 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 송수펌프실 강제환기시설 설치공사

나. 공사개요 : 당초 - 송풍기(시로스코#8, 각형덕트 0.8t 328㎡, 각형덕트 0.6t 136.8㎡

변경 - 송풍기(시로스코#9, 각형덕트 0.8t 292.44㎡, 각형덕트 0.6t 136.8㎡,                                       사다리설치, 2차측 전기공사

다. 도 급 자 : 대현산업기술(주) 대표 윤영근

라. 계약기간 : 2015.06.23 ~ 2015.8.1.

마. 변경내용 : 신규공정 및 계약물량 변경(계약금액 변경없음)

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증․감
도 급 비	48,235,000	48,235,000	변동없음

바. 설계변경 및 공종별 금액변경 사유

- 신규공종 및 계약물량 증,감 사항 발생

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비. 기타교체비

붙임  1) 설계변경 시행보고서 및 관련서류 1부

2) 설계변경심의결과보고서 및 관련 서류 각 1부.

3) 설계변경 갑지 및 내역서 각 1부.

4) 제경비검증확인서 1부

5) 합의서 1부.   끝.

★주무관	정인영		정수시설과장	윤종민		뚝도아리수정수센터소장	07/21 이성재
협조자	주무관	최양교
시행	정수시설과-2594	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5572	/전송		/		/	대시민공개