문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-5308
결재일자	2015.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
김기수	代김기수	07/21 김상근
협 조

『월영지 주변 팔각휀스 설치공사』 실정사항 검토 보고

2015. 07.

중부공원녹지사업소

북서울꿈의숲관리사무소

『월영지 주변 팔각휀스 설치공사』

실정사항 검토 보고

『월영지 주변 팔각휀스 설치공사』시행과 관련하여 공사시행 중 변경사항 등이 있어 아래와 같이 실정사항 검토 보고 드림

▢ 사업개요

◦ 공 사 명 : 월영지 주변 팔각휀스 설치공사

◦ 도 급 액 : 금12,523,500원

◦ 공사기간 : 2015.06.03. ~ 2015.07.22.

◦ 계약업체 : ㈜네이처드림 대표 강창원

◦ 공사내용 : 팔각휀스설치(2단 156m, 1단 120m), 점토블럭걷기 450㎡ 등

▢ 실정보고내용 (휀스설치물량 11경간 증가)

구 분	실정내용	검토보고내용	비고 (순공사비)
철거 및 시설물설치	▷ 월영지 주변 팔각휀스(2단) 설치물량(11경간)이 부족하여 추가설치가 필요	▶ 월영지주변 안전한 산책공간을 확보 하기 위하여 팔각휀스(2단) 설치물량 추가 반영이 필요 - 당초 52경간 → 변경 63경간(증 11경간)	증)1,121,109

▢ 개략공사비 (증 1,374,780원)

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 감	비 고
총 공 사 비		12,523,500	13,898,280	증 1,374,780
도급비	공 급 가 액	11,385,000	12,634,800	증 1,249,800
	부 가 가 치 세	1,138,500	1,263,480	증 124,980
	소 계	12,523,500	13,898,280	증 1,374,780

▢ 보고자의견

◦ 시민들이 공원을 안전하게 이용할 수 있도록 휀스설치 부족분에 대하여

추가설치를 반영하고자 불가피하게 설계변경 추진하고자 하며, 증액분에

대하여 집행잔액 등을 활용하여 추진

◦ 조속히 설치하여 시민들이 안전하게 이용할 수 있도록 공사추진에

만전을 다하고자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 내역서  1부.

2. 제비율검증표 1부.  끝.