투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행 (월영지 주변 팔각휀스 설치공사)

1. 북서울꿈의숲관리사무소-5308(2015.7.21)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『월영지 주변 팔각휀스 설치공사』와 관련 공사 시행중 변동사항이 발생하여 실정사항 검토 보고 후 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 월영지 주변 팔각휀스 설치공사

나. 공사기간 : 2015.6.3. ~ 2015.7.22.

다. 공사금액 : 금12,523,500원

라. 도 급 자 : (주)네이처드림 대표 강창원

마. 주요변경내용 : 팔각휀스(2단) 설치물량 증가(11경간)

바. 변경금액

구 분		금 액(원)			비고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		12,523,500	13,898,280	증 1,374,780
도급비	공급가액	11,385,000	12,634,800	증 1,249,800
	부가가치세	1,138,500	1,263,480	증 124,980
	소 계	12,523,500	13,898,280	증 1,374,780

사. 예산과목

- 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 공원·녹지 관리수준 향상, 남산의 산하공원 운영, 북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리, 시설비

붙임 : 1. 실정검토결과보고 1부.

2. 변경설계서 1부.

3. 제비율검증표 1부. 끝.

주무관	김기수		관리팀장	代김기수		북서울꿈의숲관리사무소장	07/21 김상근
협조자	주무관	구혜선		운영팀장	김기중		재무팀장	한선
시행	북서울꿈의숲관리사무소-5316	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257(성수동1가642-25)	/
전화	02-3780-0848	/전송	02-3780-0745	/	pinus21@seoul.go.kr	/	대시민공개