문서번호	도로보수과-6851
결재일자	2015.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
윤옥진		김권일	07/21 代이은엽
협조

‘15년 굴착복구공사 작업완료구간

현장실측 결과보고(1~2차분)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07

도로보수과

‘15년 굴착복구공사 작업완료 구간

현장실측 결과보고(1~2차분)

‘15년 관내 포장도로 굴착.복구(연간단가) 공사와 관련하여 시공사로부터 작업완료 보고서(1~2차)가 접수되어 이에 대한 현장실측 결과 및 조치계획을 보고드림.

		공사개요

❍ 공사명 : 2015년 관내포장도로 굴착복구공사(연간단가)- 강서

❍ 기  간 : ‘15.03.16~’15.12.30

❍ 물  량 : 소규모 포장복구 41a, 차로단위 복구 296a

❍ 도급비 : 594백만원

❍ 도급자 : 기성건설 주식회사 대표이사 임병호

		작업지시내용

❍ 차수별 지시내용

구분	지시일자	개소	폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비 고
1차	‘15.03.30	수명산로외10개소	1.2~4.5	2,133	3,365
2차	‘15.04.28	공항로외 4개소	1.2~3.0	1,646	2,878
계				3,779	6,243

		작업완료 및 실측결과

❍ 조사기간 : ‘15.07.15~16

❍ 조 사 자 : 발주청, 검측감리, 시공사

❍ 작업완료 보고내용

구분	노선 및 개소	폭	작업완료 보고				비 고
			굴착복구		평삭포장
			연장(m)	면적(㎡)	연장(m)	면적(㎡)
1차	수명산로외10개소	1.4~7.0	659.5	1,778.2
2차	공항로외 4개소	1.4~6.4	611.5	1,802.4	26	104
계			1,271	3,580.6	26	104

❍ 실측결과

구분	노선 및 개소	폭	현장실측결과				비 고
			굴착복구		평삭포장
			연장(m)	면적(㎡)	연장(m)	면적(㎡)
1차	수명산로외10개소	1.4~7.0	659.5	1,775.1
2차	공항로외 4개소	1.4~6.4	611	1,789.4	26	104
계			1,270.5	3,564.5	26	104

❍ 현장실측 사진

1차-신방화로(전기)	1차-남부순환로(열수송관)

2차 – 6번국도(전기)	2차 – 남부순환로(열수송관)

		조치계획

❍ 현장 실측결과에 따라 정산코자 함.

따로붙임 : 작업지시 및 완료내역 1부  끝.